11

특수공시

특수공시 사업 목록

연번	사 업 명	추 진 부 서	비 고
	14개 사업	10개 부서
1	고하도 해상데크 보행약자 시설 개선 사업	관 광 과
2	용해 생태체험시설 조성사업
3	목포종합경기장 건립	전국체전 추진단
4	반다비 체육관 건립사업
5	어촌 뉴딜 300사업	해양항만과
6	제4차 도서 종합개발
7	수산식품 수출단지 조성	수산산업과
8	수산물유통물류센터 건립
9	목포수협 활어위판장 신축
10	용당1동 공영주차장 주차타워 조성사업	교통행정과
11	해변맛길 30리 조성사업	공원녹지과
12	도서지역 상수도 해저관로 매설공사	수도과
13	임성재해위험지역 정비사업	하수과
14	1897 개항문화의 거리 조성	도시재생과

고하도 해상데크 보행약자 진출입 개선사업

경사도 높은 계단으로 연결된 해상데크의 거동 불편한 보행약자에 대한 이동편의 제공 및 접근성 향상을 위한 진출입 여건 개선

□ 개  요

○ 기    간 : 2020. ~ 2023.

○ 위    치 : 목포시 달동 산 191-4번지(고하도 해안 일원)

○ 총사업비 : 2,350백만원 (특교세 1,100 도 950 시 300)

○ 사업내용 : 경사형 엘리베이터 설치 L=54m(20인승)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	2,350	1,100	1,250
특교세	1,100	1,100
도비	950		950
시비	300		300

□ ‘22년까지 추진실적

○ 행안부 특별교부세 교부(국비 1,100백만원)	: 2020.  8.  6.

○ 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2020.  9. 24.

○ 건설기술심의 위원회 심의완료                  : 2021.  4. 19.

○ 토목공사 계약 및 착공                         : 2021.  6. 22.

○ 조달청 관급자재(엘리베이터)계약 및 착수        : 2021. 11. 30.

○ 전기, 통신공사 계약 및 착공                     : 2021. 12.  6.

○ 편입토지(2필지) 사용(무상)협의 완료             : 2021. 12. 27.

○ 산지전용 허가(협의) 완료                       : 2022.  2.  8.

○ 해역이용 협의 및 공유수면허가                 : 2022.  2. 10.

○ 고하도마을 주민설명회 실시                    : 2022.  2. 11.

○ 토목공사 착공(※일시정지:‘21. 9. 13.)           : 2022.  2. 15.

○ 기계실 및 피트실 구조물 설치                  : 2022. 11.  5.

○ 상·하부데크 설치 및 엘리베이터 제작          : 2022. 12. 31.

○ 기계실·피트실 구조물 및 레일기초 설치완료    : 2023.  2.  6.

○ 엘리베이터 및 부대시설 설치 추진중            : 2023.  4. ∼.

○ 엘리베이터 안전검사 실시(조건부 승인)          : 2023.  6. 23.

○ 안전검사 조건부 승인사항 보완 및 조치         : 2023.  7. ∼.

.

□ 향후 추진계획

○ 엘이베이터 안전검사 완료 및 필증교부          : 2023. 8. ~

○ 엘리베이터 개통 운행 및 사업준공               : 2023. 9. ~

□ 위 치 도

사업위치

전망대

승강장

주탑

해상데크(1,818m)

□ 완공사진 (조감도)

용해 생태체험시설 조성사업

이색적인 관광시설 확충으로 갓바위 일원 기존 관광시설과 연계 가족단위 즐길 수 있는 체험공간 실내체험놀이시설 조성

□ 개  요

○ 기    간 : 2019. ~ 2023.

○ 위    치 : 목포시 용해동 11-11번지 일원(자연사박물관 인근))

○ 총사업비 : 7,000백만원 (특교세 500 균특 1,500 시 5,000)

○ 사업내용

- 건축물 1동 신축[지상 2층, 지하1층, 연면적 1,627.2㎡]

- 실내체험놀이시설 1조

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	7,000	200	3,700	1,700	1400
특교세	500			500
균특	1,500	100	600	600	200
시비	5,000	100	3,100	600	1,200

□ ‘22년까지 추진실적

❍ 2020년 균특회계 지방이양(전환)사업 확정       : 2019. 11.  7.

❍ 고하 만남의 생태공원 조성 설계 용역 착수     : 2020.  4.  6.

❍ 사업위치 변경(고하도 ⇒ 갓바위 근린공원)      : 2020. 12.  1.

❍ 총사업비 변경(30억 ⇒ 55억)                   : 2021.  5. 21.

❍ 전남도 사업위치 변경 승인                    : 2021.  5. 25.

❍ 입암산 생태숲 훼손 최소화 건물 위치변경      : 2021. 10. 13.

❍ 갓바위근린공원 조성계획 변경                 : 2022.  2.  8.

❍ 총사업비 증액 보고(55억 ⇒ 70억)              : 2022.  3. 31.

❍ 건축허가 및 실시계획 인가 신청               : 2022.  4.  5.

- 실시계획 재공고(사업면적 3,103㎡ 변경, ’22.5.26)

❍ 특별교부세(지역현안) 5억원 예산 확보          : 2022.  5. 10.

❍ 道 투자심사 요청(총사업비 60억 이상)          : 2022.  5. 18.

❍ 공공디자인 심의 요청(도시계획과)              : 2022.  5. 26.

❍ 22년 제2회 건설기술위원회 심의(서면)          : 2022.  6.  2.

❍ 균특전환 보조금 교부결정(6억)                 : 2022.  6. 10.

❍ 공공디자인 심의(재검토의결)                   : 2022.  6. 17.

- 경관변화 및 조화여부 판단 자료 제공 등 보완요청

❍ 공공디자인 조치계획 보완자료 요구            : 2022.  6. 24.

❍ 道 지방재정 투자심사(조건부)                  : 2022.  7. 15.

❍ 공공디자인 재심의 신청                        : 2022.  8. 25.

❍ 경관소위원회(서면) 재심의(조건부의결)          : 2022.  9. 22.

❍ 경관소위원회 심의의견 조치계획서 제출        : 2022. 10. 24.

❍ 목포 도시계획시설사업 실시계획인가 고시      : 2022. 11. 24.

❍ 계약심사(道) 협의                             : 2022. 11. 28.

❍ ‘23년 균특전환 보조금(2억) 가내시              : 2022. 11. 30.

❍ 전라남도 사업계획 및 사업비(30억→70억) 변경승인      : 2022. 11. 30.

❍ 제로에너지 건축물 인증 수행용역 완료          : 2022. 11. 30.

❍ 목포시건축위원회 구조심의 요청(건축행정과)    : 2022. 12.  5.

❍ 전라남도 계약심사 의뢰                         : 2022. 12.   6.

❍ 용해 생태체험시설 조성사업 발주계획 보고      : 2022. 12.  8.

❍ 전라남도 계약심사 완료                        : 2022. 12.  9.

❍ 일상감사 및 계약심사(감사실)                   : 2022. 12. 12.

❍ 용해 생태체험시설 조성사업 계약의뢰           : 2022. 12. 13.

❍ 용해 생태체험시설 조성사업 계약체결           : 2022. 12. 29.

- 건축(토목,기계포함), 전기, 소방,통신, 조경

❍ 감리용역(건축,전기,소방) 계약의뢰               : 2022. 12. 29.

❍ 감리용역(건축,전기,소방) 계약체결                : 2023.  1.  4.

❍ 재해예방 기술지도 용역 계약의뢰                : 2023.  1.  4.

❍ 재해예방 기술지도 용역 계약체결                : 2023.  1.  4.

❍ 용해 생태체험시설 조성사업 착수               : 2023.  1.  9.

❍ 지하층 터파기 공사 완료                       : 2023.  3.  30.

❍ 지하층 바닥 단열재 및 기초 철근 배근완료     : 2023.  4.  13.

❍ 감리용역(구조) 계약의뢰                         : 2023.  5.  2.

❍ 감리용역(구조) 계약체결                       : 2023.  5.  4.

❍ 실내체험놀이시설 제작 및 설치 용역 입찰공고  : 2023.  5. 16.

❍ 실내체험놀이시설 제작설치 협상 제안서 평가실시  : 2023.  6. 28.

❍ 실내체험놀이시설 제작설치 협상 제안서 평가공고  : 2023.  6. 29.

❍ 실내체험놀이시설 우선협상대상자 1차 협상      : 2023.  7.  5.

❍ 실내체험놀이시설 우선협상대상자 2차 협상      : 2023.  7. 11.

❍ 실내체험놀이시설 계약의뢰	: 2023.  7. 12.

❍ 실내체험놀이시설 계약체결	: 2023.  7. 18.

□ 향후 추진계획

❍ 실내체험놀이시설 제작 및 설치                 : 2023. 7.

❍ 사업 준공                                     : 2023. 11.

□ 위 치 도

건물위치

□ 완공사진 (조감도)

어촌뉴딜 300사업(고하도항)

어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를  통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 개  요

○ 기    간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위    치 : 목포시 고하도 일원

○ 총사업비 : 12,341백만원 (국 8,638 도 1,111, 시 2,592)

- 2022년 사업비 : 2,571백만원 (국 1,090, 도444, 시 1,037)

○ 사업내용 : 공통사업1식, 특화사업 1식, 지역역량강화사업 1식

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	12,341		2,467	2,571	7,303
국비	8,638		1,727	1,090	5,821
도비	1,111		222	444	445
시비	2,592		518	1,037	1,037

□ ‘22년까지 추진실적   ※ 사업의 진행사항을 ‘22년 추진실적에 중점을 두고 작성

○ `21. 12. : 기본계획 고시(목포시 공고 제2021-216호)

○ `22.  5. : 고하도항 지역역량강화사업 용역 착수

○ `22. 10. : 특화사업(고하도항 공공건축물) 실시설계 용역 착수

○ `23.  2. : 공통사업(고하도 선착장 정비) 공사 착공

□ 향후 추진계획

○ `23. 12. : 특화사업 및 지역역량강화사업 완료

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)

제4차 도서(섬) 종합개발사업

어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를  통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 개  요

○ 기    간 : 2018. 1. ~ 2027. 12.

○ 위    치 : 관내 5개 섬(달리도,외달도,율도,고하도,장좌도)

○ 총사업비 : 19,875백만원 (국 15,900 도 1,987, 시 1,988)

- 2022년 사업비 : 1,590백만원 (국 1,272, 도159, 시 159)

○ 사업내용 : 달리도~외달도간 보행연도교 개설 등 14건

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	19,875	2,968	1,303	2,502	13,101
국비	15,900	2,663	1,083	1,955	10,199
도비	1,987	113	180	113	1,581
시비	1,987	192	40	434	1,321

□ ‘22년까지 추진실적   ※ 사업의 진행사항을 ‘22년 추진실적에 중점을 두고 작성

○ `22.  5. : 달리도~외달도간 보행연도교 설치 실시설계 용역 추진

○ `22. 12. : 율도 떡바위 선착장 조성 등 10개 사업 준공

○ `22. 12. : 달리도~외달도간 보행연도교 개설 등 4개 사업 추진 중

□ 향후 추진계획

○ `23.  9. : 달리도 선착장~쪽박섬 간 도로개설 공사 준공

○ `25. 12. : 달리도~외달도간 보행연도교 개설 준공

□ 위 치 도

율 도

달리도

외달도

고하도

장좌도

수산식품 수출단지 조성

지역수산물을 활용한 고부가가치 수산식품산업 육성 및 수출전진기지 조성으로 세계 수산시장에서 주도권 확보 및 지역경제 활성화

□ 개  요

○ 기    간 : 2016년~ 2025년

○ 위    치 : 대양동 1176-1번지 외

○ 총사업비 : 114,964백만원 (국 74,923 / 도 16,056 / 시비 23,985)

- 2022년 사업비 : 14,286백만원 (국 10,000 / 도 2,143 / 시 2,143)

○ 사업내용 : 건축물 2개동 신축 / 연면적 46,612㎡ / 지상4~5층

- 임대형 가공공장, 마른김거래소, R&D 지원시설, 냉장·냉동창고 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	114,964	10,708	1,428	14,286	88,542
국비	74,924	2,394	1,000	10,000	61,530
도비	16,056	513	214	2,143	13,186
시비	23,984	7,801	214	2,143	13,826

□ ‘22년까지 추진실적

○ 계획설계 조달청 적정성 검토 완료 : ‘22.  1.

○ 중간설계 조달청 적정성 및 경제성 검토 완료 : ‘22.  6.

○ 기본설계단계 총사업비 조정 완료(기획재정부) : ‘22. 11.

○ 실시설계 조달청 적정성 검토 완료 : ‘23.  7.

□ 향후 추진계획

○ 실시설계단계 총사업비 조정협의(기획재정부) : ‘23. 7. ~

○ 공사발주를 위한 행정절차 등 이행 : ‘23. 8. ~

□ 기대효과

○ 고부가가치 수산식품산업 육성 및 수출전진기지 조성으로 세계 수산 시장에서 주도권 확보 및 지역경제 활성화

□ 위 치 도

대양산단

수산식품

수출단지

□ 조 감 도

수산물 유통물류센터 건립

어획량 증가 및 관내 제빙공장 폐업에 따라 부족한 냉동･냉장(제빙, 저빙)시설을

확충하여 산지 유통기능 강화 및 유통구조 개선을 도모하고자 함

□ 개  요

○ 기    간 : 2021 ~ 2022

○ 위    치 : 목포시 죽교동 674-3

○ 총사업비 : 19,200백만원(도비 9,60050%, 시비 4,80025%, 자부담 4,80025%)

- 2022년 사업비 : 18,380백만원 (도 9,190, 시 4,595, 자 4,595)

○ 사업내용 : 목포 수산물유통물류센터 건립

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	19,200		820	18,380	-
도비	9,600		410	9,190	-
시비	4,800		205	4,595	-
자부담	4,800		205	4,595	-

□ ‘22년까지 추진실적

○ 타당성 조사 용역(목포수협)                  : ′20. 11. ~ ′21. 2.

○ 전라남도 지방재정 투자심사                 : ′21.  5.

※ [투자심사결과] 조건부(2단계) / 실시설계 후 2단계 심사

- 공공성 확보 및 주변 시설과 연계한 활용도 제고 방안 마련

- 도비 재원대책 마련 ⇒ `22년 균특예산 91.9억원 확정 (시비 45.95억원 추경 반영 예정)

○ 항만공사 시행허가 승인(해수청)             : ′21. 10. 27.

○ 사업계획 변경 승인(전라남도)               : ′21. 11. 19.

- 사업규모 축소(6,600→5,151m2)

○ 기본 및 실시설계용역 완료(수협)            : ′21. 11.

○ 전라남도 지방재정 투자심사 의뢰(2단계)     : ′21. 12.

- 투자심사(수시) 심의 : `22. 1. 10. ~ 13.(예정)

○ 공사 착공 및 준공 (수협)                   : ′22. 1. ~ ′23. 1.

□ 기대효과

○ 시설 확충을 통한 유통구조 개선

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)

목포수협 활어위판장 신축

활어위판물량 증가에 따른 위판장 부족 현상이 초래되고 있어 균특회계 전환사업으로 추가 구축하는 사업임

□ 개  요

○ 기    간 : 2021년~ 2022년

○ 위    치 : 죽교동 620-321번지

○ 총사업비 : 5,000백만원 (도 1,500 / 시 1,500 / 자부담 2,000)

- 2022년 사업비 : 2,833백만원 (도 850 / 시 850 / 자부담 1,133)

○ 사업내용 : 위판장(수조 45개), 해수취수시설, 어업인휴게실 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	5,000	-	2,167	2,833	-
도비	1,500	-	650	850	-
시비	1,500	-	650	850	-
자부담	2,000	-	867	1,133	-

□ ‘22년까지 추진실적

○ 기본 및 실시설계용역 완료(수협) : ‘21.  9.

○ 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인(해수청) : ‘21. 10.

○ 공사 착공(수협) : ‘21. 12.

○ 비관리청 항만개발사업 준공(해수청) : ‘22.  8.

□ 향후 추진계획

○ 보조사업 사후 점검·관리

□ 기대효과

○ 거점 위판장 역할을 통한 활어유통 경쟁력 강화로 지역경제 활성화

□ 위 치 도

목포시 활어회플라자

□ 완공사진

용당1동 공영주차장 주차타워 조성

상가 및 다세대 주택 밀집 구역이며, 지역 내 가장 활성화되고 있는 재래시장 주변 구역으로 주차 공간이 부족하여 주택가와 도로변 주차로 인한 교통체증 및 시민들의 불편 해소를 위함

□ 개  요

○ 기    간 : ‘22. 1. ~ ’23. 12.

○ 위    치 : 용당동 965-25번지 외 5필지(용당1동행정복지센터 옆)

○ 총사업비 : 3,600백만원 (도 1,800, 시 1,800)

- 2022년 사업비 : 2,800백만원 (도 1,300, 시 1,500)

○ 사업내용 : 지사 3층(4단), 주차대수 200대

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	3,600			2,800	800
국비				-	-
도비				1,300	500
시비				1,500	300

□ ‘22년까지 추진실적

○  ’20. 11. : 2021~2025 중기지방재정계획 반영

○  ‘21.  9. : 지방재정 투자심사

○  ‘21. 12. : 주차타워 조성사업비 반영(’22년 본예산/도15억원 시15억원)

○  ‘22.  2. : 실시설계용역 착수 *일시정지 중 : ’22.4.23. ~ 현재

- 사업효과 제고 요구(주차면 추가 확보) : 사유지 1개 필지(165㎡) 매입 필요

○  ‘22.  4. : 주민설명회 개최(4.7/용당1동 행정복지센터)

○  ‘22.  6. : 토지매입 등을 위한 행정절차 추진

- 도시관리계획(변경), 보상, 사업계획(변경)

□ 향후 추진계획

○ ’23.  3. ~  8. : 실시설계 및 실시계획 인가 고시 완료 및 행정절차이행(토지보상 등)

○ ’23.  9. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

□ 위 치 도

용당1동

행정복지센터

목상고등학교

목포고등학교

사업부지

□ 현장사진

목포 해변맛길 30리 조성사업

목포시의 아름다운 해변을 활용 관광객 및 시민들에게 바닷길 도보여행길을 제공하고, 문화․역사․주변 관광자원과 연계한 낭만과 맛이 있는 관광자원 조성을 통해 관광활성화에 기여

□ 개  요

○ 기    간 : 2020 ~ 2024

○ 위    치 : 평화광장~갓바위~남항~삼학도~목포항~해양대

○ 총사업비 : 10,000백만원 (균특전환 5,000,  시비 5,000)

- 2022년 사업비 : 800백만원 (균특전환 400,  시비400)

○ 사업내용

구 간	컨 셉	위 치	도 입 시 설	비고
계		5구간 12.0km
1	바닷가 미술관길	평화광장~남항	조형미술관, 전망쉼터, 목교, 해변데크	2.6㎞
2	환경보호 생태길	남항~대삼학교	습지생태원, 철새관찰장, 갈대숲길	2.3㎞
3	온가족 나들이길	대삼학교~요트마리나	사계정원, 조형물, 포토존, 경관시설	1.8㎞
4	개항 역사문화길	요트마리나~수협직판장	어시장 상징물, 근대역사체험존, 해변쉼터	2.4㎞
5	해변 연인의 길	수협직판장~해양대	바다전망대, 바닷길 포토존, 안내판	2.9㎞

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	10,000	2,000	4,000	800	3,200
국비
도비	5,000	1,000	2,000	400	1,600
시비	5,000	1,000	2,000	400	1,600

□ ‘22년까지 추진실적

○ 목포 해변맛길 30리 1단계(2, 3구간) 개통

○ 목포 해변맛길 30리 2단계(5구간) 공사발주

□ 향후 추진계획

○ 목포 해변맛길 30리 2단계(5구간) 준공        - 2023년

○ 목포 해변맛길 30리 1단계(1. 4구간) 추진      - 2024년

□ 기대효과

○ 아름다운 해변풍광과 근대역사 문화공간, 맛이 어우러지는 시너지 효과를 극대화하여 다시 찾고 싶은 관광도시 브랜드 가치 제고

□ 위 치 도

1구간

2구간

3구간

4구간

5구간

□ 완공사진 (조감도)

도서지역 상수도 해저관로 매설공사

지하수 수량감소 ‧ 염분유입 등으로 생활용수가 부족한 도서지역(율도, 달리도, 외달도)에 해저관로를 매설하여 지역 주민들의 식수난 해결

□ 개  요

○ 기    간 : 2017년 ~ 2023년

○ 위    치 : 목포시 유달동 도서지역(장좌도,율도,달리도,외달도)

○ 총사업비 : 18,493백만원 (국 12,735 도 1,107 시 4,651 )

- 2022년 사업비 : 3,056백만원 (국 1,446 도 186 시 1,424 )

○ 사업내용 : 관로신설 D=80~150mm, 14.8km(해저 4.8, 육상 10)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	18,493	11,357	4,080	3,056	-
국비	12,735	8,550	2,739	1,446	-
도비	1,107	570	351	186	-
시비	4,651	2,237	990	1,424	-

□ ‘22년까지 추진실적

○ ’18. 10월 : 일반수도사업인가 승인(전라남도)

○ ‘18. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료

○ ’19. 11월 : 공사 착공

○ ‘20. 10월 : 장좌도 용수공급

○ ’21. 10월 : 율도 용수공급

○ ’22. 03월 : 달리도 용수공급

○ ’22. 06월 : 외달도 용수공급

○ ’22. 10월 : 준공식

□ 향후 추진계획

○ ’23. 10월 : 상수관로 매설부지 협의 매수 추진

□ 기대효과

○ 도서민의 식수 및 생활용수의 안정적 공급으로 물 복지 실현

○ 용수공급 기반시설 확충으로 섬 지역 개발활성화 기여

□ 위 치 도

1차분 D=150mm, L=3.7㎞

(육상 1.8, 해상 1.9)

2차분 D=75~150mm, L=3.4㎞

(육상 1.7, 해상 1.7)

4차분 D=80~100mm, L=5.1㎞

(육상 3.9, 해상 1.2)

3차분 D=100mm, L=2.6㎞

(육상구간)

임성재해위험지역 정비사업

홍수시 도심을 관류하는 소하천의 범람우려 및 내수배제 불량으로 상습침수 발생, 도시침수 방재대책으로 안전한 도시환경 조성

□ 개  요

○ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년

○ 위    치 : 목포시 석현동 604-1번지 일원(석현뜰 일원)

○ 총사업비 : 20,000백만원 (국 10,000  시 10,000   )

- 2022년 사업비 :  2,516백만원 (국 1,458  시 1,058  )

○ 사업내용 : 배수펌프장 1개소, 소하천 정비, 교량(선곡교) 개선 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2022년	2023년	2024년이후
계	20,000	1,200	2,516	8,140	8,144
국비	10,000	400	1,458	4,070	4,072
도비	-	-	-	-	-
시비	10,000	800	1,058	4,070	4,072

□ ‘22년까지 추진실적

○ '20.  2. : 자연재해위험개선지구 타당성 조사 추진

○ '20. 10. : 자연재해위험개선지구 지정ㆍ고시

○ '21.  4. ~ : 용역 착수 및 과업 이행(화신엔지니어링 외 4개사)

○ '22.  6. : 토지보상 완료(1필지)

○ '22.  9. : 사업 추진을 위한 전문가 자문회의(행정안전부)

○ '22. 11. : 전문가 자문회의 조치계획 보고(행정안전부)

□ 향후 추진계획

○ '23. 12. : 행정절차 완료(사전설계 검토 등)

○ '24.  1. : 정비사업 공사 추진

□ 위치도

1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업

목포 원도심 지역 정체성 강화 및 사회․경제적 성장기반 확충 등을 통한 주민 삶의 향상 등으로 도시경쟁력 제고

□ 개  요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2024

○ 위    치 : 만호동 일원 295㎢

○ 사 업 비 : 316.5억원 (국비 150억,시비 100.5억,기타 66억〈LH 45.5, 기금 20, 민간 0.5〉)

- 2022년 사업비 : 4,181백만원 (국 2,509, 시 1,722)

○ 사업내용 : 개항문화거리 관광루트개발 등 9개 마중물사업

□ 연도별 투자계획                            (단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계	25,050	12,689	8,130	4,181	-
국비	15,000	7,850	4,641	2,509	-
도비	-	-	-	-	-
시비	10,050	4,839	3,489	1,722	-

□ ‘22년까지 추진실적

○ ‘19.  2. ~         : 도시재생대학 및 마을학교 운영

○ ‘19.  4. ~         : 1898 개항문화거리 주민공모사업 추진

○ ‘19.  8. ~‘22.  5. : 개항문화거리 다목적광장(주차장) 조성 완료

○ ‘19.  9. ~         : 지역상권 활성화사업 추진(건맥축제 등)

○ ‘19. 11. ~‘22.  6. : 목포세관 예술플랫폼 조성 완료

○ ‘19. 12. ~         : 청년창업 인큐베이팅 플랫폼 조성

○ ‘20.  3. ~‘20.  5. : 1897 개항문화거리 주민쉼터 조성 완료

○ ‘21.  4. ~‘22.  2. : 탐방안내센터 조성 완료

□ 향후 추진 계획

○‘23. 7. ~ : 도시재생 활성화계획 국토부 변경승인 추진

- 사업기간 변경 : 인큐베이팅 플랫폼 기간 연장

- 사업비 변경   : 인큐베이팅 플랫폼 및 청년창업상가

- 세부사업 신설 : 도시민박형 마을기업 육성프로그램

□ 구 상 도

□ 조 감 도