【별지7】10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

용해2지구∼백련펌프장간 하수관거 정비

담당자

하수과 우기훈(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해지구 일원의 배수구역에서 발생되는 우수를 신속히 배제하여 침수방지 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2022년

○ 위 치 : 신동마을 ~ 백련펌프장(압해대교 아래)

○ 규 모 : 하수관로 정비 L=1,384m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,793백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,793	15,593	1,700	-	-
국 비	12,985	12,985	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,808	5,108	1,700	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ '16. 10. : 공사 착공

○ '17.  9. : 1차분 공사 준공(하수관로 정비 L=406m 및 개거 정비 264m)

○ '18.  6. : 2차분 공사 준공(하수관로 정비 L=140m)

○ '19.  3. : 3차분 공사 준공(하수관로 정비 L=180m)

○ '20.  4. : 4차분 공사 준공(하수관로 정비 L=80m)

○ '20.  5. : 5차분 공사 준공(하수관로 정비 L=31m)

○ '21.  8. : 6차분 공사 준공(하수관로 정비 L=109m)

○ '22.  4. : 7차분 공사 준공(하수관로 정비 L=90m)

○ '22. 12. : 8차분 공사 준공(하수관로 정비 L=84m) 및 정비사업 완료

□ 사업변경 내역(해당 시 작성)

○ 총사업비 : 당초 18,550백만원 → 변경 19,793백만원

○ 사업기간 : 당초 2014~2021 → 변경 2014~2022

사업명

서남권 수산종합지원단지 조성

담당자

수산산업과 오영도(☎270-3665)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북항 배후부지 내에 수산물 생산ㆍ유통ㆍ물류 기능을 집적화 시켜 원스톱으로 어업활동을 종합적으로 지원할 수 있도록 기반시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2020

○ 위 치 : 목포시 죽교동 674-2, 674-3, 693-1

○ 규 모 : 부지 101,951㎡, 연면적 14,366㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 37,941백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	37,941	37,941	-	-	-
국 비	17,923	17,923	-	-	-
시 도 비	796	796	-	-	-
시군구비	6,965	6,965	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	12,257	12,257	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 목포수협 업무시설 일부 이전(‘22. 5.)

‣ 4개실, 3개과, 1팀(조합장실, 경제상임이사실, 지도·경제상무실 등)

○ 업무기능 이전 준공식 개최(’23. 5.)

‣ 이전시설 : 판매1과, 위판장업무, 유통영업과

사업명

하수도정비 중점관리지역 정비

담당자

하수과 우기훈(☎270-3537)

□ 사업목적 및 필요성

○ 30년 빈도 침수피해를 대비하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정되어

하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2025년

○ 위 치 : 용당 1·2동, 상동 일원

○ 규 모 : 입암천바닥정비 L=1.31km, 상동지구 방류관로, 상리대하수도 PC  암거 L=121m, 제어관리시스템 1식, 석현뜰 관로개선 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  35,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	35,016	31,833	680	1,000	3,924
국 비	24,511	24,511	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	10,005	6,822	680	1,000	3,924

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  86%)

○ '13.  2. : 하수도정비 중점관리지역 지정 고시

○ '17.  2. : 1차분 공사 착공

○ '17.  4. : 2차분 공사 착공

○ '18. 11. : 1차분 공사 준공

○ '22.  2. : 2차분 공사 준공

○ '22.  4. ~ 현재 : 사업계획 변경 협의 중(영산강유역환경청, 한국환경공단)

□ 향후계획

○ '23.  9. : 사업계획 변경 협의 완료

○ '24.  1. ~ ’25. 12. : 공사 착공 및 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2013 ~ 2020 → 변경 2013 ~ 2024

○ 사업규모

- 당 초 : 입암천 정비 L=1.31km, 상리대하수도 PC암거 L=121m, 제어관리시스템 1식

- 변 경 : 입암천 정비 L=1.31km, 상리대하수도 PC암거 L=121m, 제어관리시스템 1식, 석현뜰 관로개선 1식

사업명

목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업

담당자

자원순환과 이승민(☎270-8585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매립장의 사용연한이 도래하고 있으나 신규 매립지 확보가 어려우므로 사용

중인 매립장 일부를 굴착 후 재사용함으로써 사용기간 연장

□ 사업개요

○ 기   간 : 2016년 ~ 2022년

○ 위   치 : 목포시 대양로 241-41 일원(목포시 위생매립장 내)

○ 규   모 : 폐기물 굴착 516,000㎥, 선별 645,000㎥, 매립장 조성 34,778㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,964백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	33,964	26,584	7,380	-	-
국 비	16,100	12,358	3,742	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,864	7,864	-	-	-
지 방 채	10,000	6,362	3,638	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  3. : 지방재정투자사업 중앙심사 완료

○ 2018. 10. : 기본 및 실시설계 용역 · 도 건설기술심의 완료

○ 2019.  9. : 시설공사 계약체결 및 착공

○ 2020.  5. ~ : 폐기물 굴착·선별 및 압축·포장

○ 2022. 12. 22 : 폐기물 굴착·선별 및 매립지 조성 완료(준공)

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

동명동 송도마을 도시취약지역

담당자

도시재생과 김은향(☎270-3686)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 취약지역 주민의 기본적인 생활여건 개선을 위해 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 2. ~ 2022. 12. <7년>

○ 위 치 : 전남 목포시 동명동 60번지 일원

○ 규 모 : A=14,547㎡, 5개 분야 22개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,932백만원(국 2,429, 도 243, 시 1,261)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,932	2,856	1,076	-	-
국 비	2,429	2,176	253	-	-
시 도 비	243	190	53	-	-
시군구비	1,261	490	771	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

○ ‘21. 10. : 지적재조사 사업 완료

○ ’21. 11. : 도시가스 설치(12세대, L=350m), 골목정원 및 체육공원 조성 완료

○ ’21. 11. : 마을안길 조성, CCTV(5EA) 및 보안등(8EA) 설치 완료

○ ’22. 12. : 공동홈(A=165㎡) 조성 완료

□ 향후계획

○ ‘22. 7. : 커뮤니티센터 준공 및 BF 본인증 취득 완료

○ ’22. 8. : 휴먼케어 및 주민역량강화 용역 완료

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 연장 : 2016. 2. ~ 2019. 12. → 2016. 2. ~ 2022. 12.

○ 사업비 : 4,301백만원(국 3,287, 도 304, 시 710) → 3,932백만원(국 2,429, 도 243, 시 1,261)

※ 2019년까지 미집행 잔여 사업비 불용 처리

사업명

용해지구 문화시설 건립사업

담당자

인재육성과 김재훈(☎061-1257)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용해지구 내 신축 아파트 건축으로 거주 인구가 급증함에 따라 문화시설 용지에 우리 시 거점 도서관 건립으로 지역민의 문화복지를 충족시키고, 지역 내 공동체 커뮤니티 역할을 할 수 있는 문화시설로 활용하여 사회문화 발전에 이바지하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 03. 02. ~ 2022. 06. 24.

○ 위    치 : 목포시 용해동 997-1번지

○ 규    모 : 부지 2,000㎡, 연면적 4,424㎡(지하1층, 지상3층)

○ 사업내용 : 도서관, 장난감도서관, 주거지주차장 포함 문화시설 건립

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,986백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,933	4,052	8,881	-	-
국 비	5,790	1,999	3,791	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,143	2,053	5,090	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공  사 준공 : 2022. 6월

○ 도서관 개관 : 2022. 10월

□ 향후계획

○ 시설운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : (투자심사) 106억원 ⇨ (최종) 129억원 (증 22%)

○ 사업기간 변경 (당초) 2021. 3. 2. ~ 2022. 4. 30 ⇨ (변경) 2021. 3. 2. ~ 2022. 6. 24.

- 철근수급 지연으로 인하여 ‘21. 07. 30. ~ 09. 30.(2개월) 사업중지

사업명

목포 해양레포츠센터 건립사업

담당자

해양항만과  노태진(☎270-8549)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양레포츠 교육·훈련·체험할 수 있는 센터를 건립하여 서남권 해양레포츠 이용인구 저변확대 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년~2025년

○ 위 치 : 죽교동 571-100번지 [국유지(교육부)]

○ 규 모 : 레포츠센터 1동, 슬립웨이 1개소, 계류시설 20척 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,500	4,636	-	-	2,864
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,750	2,318	-	-	1,432
시군구비	3,750	2,318	-	-	1,432
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 타당성조사 및 기본계획수립 용역, 전남도 투자심사 : `16.11. ~ ’18.6.

○ 기본 및 실시설계용역 착수 : ‘19. 9

○ 주민설명회 개최 : ’21. 2

○ 道 사업계획 변경 승인                         : ‘22. 11. 14.

- 위치 : 평화광장 ⇒ 해양대 / 기한 : ‘22년 ⇒ ‘25년

○ 기본계획 및 타당성 용역 착수  : ‘22. 12.  2.

☐ 향후계획

○ 기본계획 및 타당성 용역 보고회 개최  :  ‘23. 9.

사업명

목포종합경기장 건립

담당자

전국체전추진단 김선웅(☎270-4458)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2023년 전국체전 및 전국장애인체전의 개․폐회식 및 육상경기장으로 활용될 종합경기장 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 12. ~ 2023. 7.

○ 위 치 : 목포시 대양동 산124번지 일원

○ 규 모 : 연면적 26,468㎡, 지상 3층, 관람석 16,468석 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 105,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	105,000	64,400	29,100	11,500	-
국 비	20,000	16,000	4,000	-	-
시 도 비	33,000	18,000	5,000	10,000	-
시군구비	52,000	30,400	20,100	1,500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  97%)

○ 토목공사 착공                : 2019. 12. 9.

○ 총괄 공사 계약               : 2020. 10. 28.

○ 2차분 공사 착공 및 추진      : 2020. 11. 5.~

□ 향후계획

○ 공사 준공 및 시운전          : 2023. 7. ~ 8.

○ 육상 프레대회 개최           : 2023. 8. 19.~21.

○ 전국체전 및 장애인체전 개최  : 2023. 10.~11.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 920억원(국비 200, 도비 230, 시비 490)

변경 1,050억원(국비 200, 도비 330, 시비 520)

사업명

목포 달리도항․어망촌항

‘슬로우 아일랜드’ 조성사업

담당자

해양항만과 김용소(☎270-8858)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양환경 관광화를 통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023(5년)

○ 위 치 : 목포시 달리도, 외달도 일원

○ 규 모 : 공통사업(어촌․어항 현대화사업) 및 특화사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,436백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,436	6,924	4,059	2,453	-
국 비	9,405	6,171	2,290	944	-
시 도 비	1,162	350	562	250	-
시군구비	2,869	403	1,207	1,259	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `20. 10. : 달리도항 선착장 정비 등 공통사업 완료

○ `22. 12. : 지역역량강화사업 용역 완료

○ `23.  6. : 외달도 바다자연정원 조성 등 특화사업 완료

□ 향후계획

○ `23. 12. : 사업 준공보고

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

목포반다비체육센터 건립공사

담당자

전국체전추진단 신윤철(☎270-4459)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠 복지 인프라 조성으로 장애인 생활체육 활성화 및 지역사회 교류 증진

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘22. 9. 8. ~ ’23. 9. 7.

○ 위    치 : 목포시 대양동 산 124번지 일원

○ 총사업비 : 10,000백만원 (국4,000 시6,000)

- 2022년 사업비 : 9,700백만원 (국4,000 시5,700)

○ 사업내용 : 체육관, 수중치료실 등(지상2층, 연면적 2330.77㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	4,000	5,700	300	-
국 비	4,000	2,000	2,000	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,000	2,000	3,700	300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 64%)

○ 전라남도 계약심사 : ’22. 7. 11.

○ 공사착공          : ‘22. 9. 8.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : ’23. 9. 7.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

수산식품 수출단지 조성사업

담당자

수산산업과 강찬승(☎270-8327)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역수산물을 활용한 고부가가치 수산식품산업 육성 및 수출전진기지 조성

○ 세계 수산시장에서 주도권 확보 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년 (6년)

○ 위 치 : 대양동 1176-1번지

○ 규 모 : 2개동 / 연면적 46,612㎡ / 지상4~5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 114,964백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	114,964	10,260	1,411	27,608	75,685
국 비	74,923	2,935	310	19,148	52,530
도 비	16,056	12	501	4,286	11,257
시 비	23,985	7,313	600	4,174	11,898

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ ‘19.  1. : 예비타당성 조사 면제

○ ‘19.  7. : 사업계획 적정성 검토 완료

○ ‘20. 12. : 기본계획 수립 완료

○ ‘22.  1. : 계획설계 조달청 적정성 검토 완료

○ ‘22.  6. : 중간설계 조달청 적정성 및 경제성 검토 완료

○ ‘22. 11. : 기본설계단계 총사업비 조정 완료(기획재정부)

○ ‘23.  7. : 실시설계 조달청 적정성 검토 진행

□ 향후계획

○ ‘23.  7. : 실시설계 조달청 적정성검토 완료 및 기획재정부 총사업비 조정협의 추진

○ ‘23.  8. : 공사발주를 위한 행정절차 이행

○ ‘23. 11. : 수산식품 수출단지 조성공사 착공

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	총 사 업 비
	변경 전	변경 후	증감
계	108,890	114,964	6,074
국 비	71,121	74,923	3,802
도 비	15,240	16,056	816
시 비	22,529	23,985	1,456

○ 변경 사유

- 물가변동 등을 반영한 총사업비 조정 (기획재정부 협의)

사업명

율도 어촌뉴딜 300사업

담당자

해양항만과 김용소(☎270-8858)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양환경 관광화를 통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023(4년)

○ 위 치 : 목포시 율도 일원

○ 규 모 : 공통사업(어촌․어항 현대화사업) 및 특화사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,342백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,342	3,109	1,955	7,278	-
국 비	8,639	2,578	1,493	4,568	-
시 도 비	1,111	286	15	810	-
시군구비	2,592	245	447	1,900	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ `22.  6. : 율도2구 방파제 시설공사 등 공통사업 완료

○ `22.  6. : 율도1구, 2구 마을회관 정비 완료

○ `23.  6. : 율도 힐링센터 조성 등 특화사업 착공

□ 향후계획

○ `23. 12. : 특화사업 및 지역역량강화사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

서산․온금 재정비 촉진지구 기반시설 조성

담당자

도시문화재과 김현곤(☎270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 대표적인 노후․불량주거지 밀집지역으로 주거환경이 열악하고 낙후된 지역인 서산․온금지역에 도시재정비사업 및 도시기반시설을 확충하여 정주여건을 조성하여 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 3. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 목포시 서산동, 온금동, 금화동 일원

○ 규 모

∙도로(L=3.3㎞, B=6~25m), 상수도(5.5㎞), 하수도(7.0㎞)

∙공원(46,362㎡), 경관녹지(19,485㎡), 주차장(2,364㎡), 전기 및 부대시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	39,400	12,939	842	7,619	18,000
국 비	19,700	6,469.5	421	3,809.5	9,000
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	19,700	6,469.5	421	3,809.5	9,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2009. 11 : 서산․온금 재정비촉진지구 지정

○ 2012. 11 : 서산․온금지구 재정비촉진계획 결정

○ 2017. 10 : 재정비촉진지구 및 촉진계획 결정(변경) 고시

○ 2022.  9 : 재정비촉진지구 및 촉진계획 결정(변경) 고시

□ 향후계획

○ 2023. 8 : 서산온금재정비촉진지구 내 기반시설 실시설계용역

○ 2024. 1 ~ 12 : 실시계획 인가, 공사 착공 및 준공

사업명

첨단소재 융합제품 사용화 기반 강화

담당자

지역경제과 김승규(☎3356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역혁신인프라 연계 상용화지원 플랫폼 구축 운영을 통한 고부가가치 첨단소재 융합제품 상용화 촉진 및 지역 중소기업 전주기 기술 지원

□ 사업개요

○ 기 간 :  2020. 6. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 목포시 대양로 26

○ 규 모 :

◦ (플랫폼 구축) 기업지원을 위한 혁신기관간 장비간 협력 네트워크 구축

◦ (장비확충) 장비 도입, 노후장비 교체, 업그레이드 및 이전 재배치 등

◦ (기술지원) 시제품제작, 시험 평가 인증, 기술애로 해결 등

◦ (인력양성) 장비를 활용한 전문 인력양성 프로그램 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,187백만원

(단위 : 백만원)

구 분		계	집행액		향후 소요액
			기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계		8,187	6,489	1,698	-	-
국 비		5,675	4,738	937	-	-
시 도 비		548	419	129	-	-
시군구비	목포	426	326	100	-	-
	순천	426	326	100	-	-
	고흥	426	326	100	-	-
지 방 채		-	-	-	-	-
민간자본		686	354	332	-	-
기 타		-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○’20년도 지역산업거점 스마트기반구축사업 시도설명회(’19. 2./KIAT)

○ 지역평가위원회(’19. 2.)

○ 스마트특성화 지역거점기관지원사업 민간평가위원회(’19. 5.)

○ 1, 2차 전문가 컨설팅(’19. 5 ∼ 6.)

○ 수정기획보고서 확정 및 예산안 보고(’19. 8./KIAT)

○ 사업 평가위원회(’20. 3.)

○ 첨단소재 융합제품 상용화지원을 위한 인프라 보강 및 연계지원 플랫폼 구축(’20)

○ 전주기 기술지원 체제 확립 및 상용화 기술지원 서비스품질 제고(’21)

○ 지역부합형 첨단소재 융합제품 상용화 및 가치사슬 연계성과 창출(’22)

사업명

전기추진차도선 및 이동식 전원공급 시스템 개발

담당자

지역경제과 김승규(☎3356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국민의 대기환경 개선 요구에 따른 미세먼지 저감 및 기후·환경변화 관련 국제규제* 대응 필요

○ 국내 연안 환경에 맞는 친환경 무탄소 배출 연안선박 기술을 개발/적용하여 연안 여객/해운이 밀집*한 전남/목포 지역의 경제 활성화 및 미래 먹거리 산업 육성 기반 확보

□ 사업개요

○ 기 간 :  2020. 4. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 목포시 남항 일원(용해동 1059)

○ 규 모 :

◦ 순수 전기추진 차도선 개발 및 실증 : 114.7억원

- 이동식 전원공급시스템 기반 전기추진차도선 개발 및 실증 : 94.7억원

- ICT 기반 전기추진 차도선 제어 및 운용 기술개발 : 20억원

◦ 이동교체식 전원공급시스템 개발 : 151억원

- DC전원 기반 1MW급 전기추진시스템 기술개발 : 80억원

- 800kWh급 이동교체식 전원공급시스템 기술개발 : 53억원

- 연안선박용 전원공급시스템 표준화 기술개발 : 18억원

◦ 이동교체식 전원공급시스템 운영 기술개발 : 185억원

- 대용량 전원공급시스템 충전 및 인프라운영 기술개발 : 39억원

- 이동교체식 전원공급시스템 기반 도서전력공급 기술개발 : 41억원

- 전기추진차도선 및 전원공급시스템 운영체계 기술개발 및 실증 : 105억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	45,100	33,030	4,884	4,050	3,106
국 비	26,800	19,950	2,154	2,200	2,496
시 도 비	3,600	2,520	640	440
시군구비	5,400	3,780	960	660
지 방 채
민간자본	9,300	6,780	1,130	750	610
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2018. 10. : 연구기획 초안 해수부 접수 (선박해양플랜트연구소)

○ 2019.  1. : 연구기획 착수 (선박해양플랜트연구소)

○ 2019.  2. : 산학연 전문가 기획위원회 구성

○ 2019.  4. : 전라남도/목포시 연구 참여 확정

○ 2019.  5. : 연구기획 보고서 제출

○ 2019.  8. : 사업 및 예산 심의(해양수산부, 과학기술정보통신부)

○ 2019. 12. : 예산 심의 확정 (기획재정부, 국회)

○ 2020.  1. : 사업공고(해양수산과학기술진흥원)

○ 2020.  2. : 사업 신청

○ 2020.  3. : 사업 평가/확정 (주관 : 선박해양플랜트연구소)

○ 2020.  4. : 사업협약체결(연구개발계획서 제출)

○ 2020.  5. : 전라남도, 목포시 및 민간 간 업무협정 체결

○ 2020.  4. ∼ 2020. 12. : 전기추진 차도선 및 이동교체식 전원공급시스템 설계 및 주요 구성품 제작/도입

○ 2021.  1. ∼ 2021. 12. : 전기추진 차도선 및 이동교체식 전원공급시스템제작 및 도서 전원공급시스템 설계

○ 2022.  1. ∼ 2022. 12. : 전기추진 차도선 건조완료 및 이동교체식 전원공급시스템 통합, 도서 전원공급시스템 제작

○ 2023.  1. ∼ 2023. 08. : 전기추진 차도선 시운전, 도서 전원공급시스템 설치

□ 향후계획

○ 2023.  9. ∼ 2024. 12. : 이동식 전원공급시스템 기반 순수 전기추진 차도선 및 도서전력공급 운영 실증

○ 2025.  1. ∼ : 무탄소 배출 순수 전기추진차도선 및 도서전력공급 체계 운영 및 보급사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

목포 어묵 세계화 기반구축 및 육성전략

담당자

수산진흥과 황기범(☎270-3607)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 성장하고 있는 어묵시장 개척을 목표로 풍부한 수산물을 활용한 고부가        가치산업 육성을 통해 전국 제1의 수산식품도시 선도

○ HACCP 시설을 갖춘 임대형공장 등 각종 인프라를 구축하여 관련 기업 및       창업 육성을 통한 지역경제 활성화와 일자리 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 목포시 대양동 1180-17(대양산단)

○ 규 모 : 부지 5,610㎡, 건축면적 2,640㎡(1층 예정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	1,559	527	464	7,450
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	52	485	232	4,231
시군구비	5,000	1,507	42	232	3,219
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2021년 전남형 지역성장 전략사업 최종선정 : ‘20. 8.

○ 2020년 2차 전라남도 지방재정 투자심사 : ‘20. 11.

○ 목포어묵 HACCP 가공공장 구축을 위한 부지매입 : ‘21. 6.

○ 목포어묵사업 기본계획 수립 용역 : ‘21. 9. ~ ‘22. 5.

○ 운영방안 검토 및 기본계획 보완 : ‘22. 12. ~ ‘23. 2.

○ 기본 및 실시설계 용역 계약 : ‘23. 6.

□ 향후계획

○ 목포어묵 HACCP 가공공장 건립사업 기본 및 실시설계 용역 : ‘22. 7. ~

○ 목포어묵 HACCP 가공공장 착공 : ‘23. 1.

사업명

목포해상W쇼(목포 해상판타지쇼 운영)

담당자

관광과 박진희(☎270-8431)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 대표 체류형 야간관광 콘텐츠로 자리매김함에 따라 더욱 업그레이드 된 콘텐츠 운영으로 국제해양 관광도시 브랜드 가치 제고 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년 <3년간>

○ 위 치 : 평화광장 춤추는 바다분수 해상무대 일원

○ 규 모 : 해상무대 뮤지컬 ＋ 춤추는 바다분수 + 불꽃쇼

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,150	866	684	800	-
국 비	1,575	433	342	400	-
시 도 비	629	173	136	160	-
시군구비	946	260	206	240	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ `22. 9월 ~ `22. 12월, 목포해상W쇼 총 10회 공연 운영

(목포뮤직플레이 2회, 목포항구축제 2회 특별운영 별도)

○ 2023 목포해상W쇼 기본계획 수립                  : ‘22. 12월

○ 2023 목포해상W쇼 사전규격 공개 및 입찰공고      : ‘22. 12월

○ 2023 목포해상W쇼 협상 및 대행사 선정            : ‘23. 4월

○ 2023 목포해상W쇼 세부실행계획수립               : ‘23. 4월

○ 2023 목포해상W쇼 개최                           : ‘23. 4월~11월

□ 향후계획

○ 2023 목포해상W쇼 개최                           : ‘23. 4월~11월

사업명

목포 항구축제

담당자

관광과 정경란(☎270-8441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포항과 삼학도를  중심으로 바다위 어시장이었던 파시(波市) 장터를 재현하며         만선의 기쁨이 가득한 목포를 축제로 구현

○ 지역 수산물과 수산업의 발전을 유도하고, 지역브랜드 가치를 높여 관광   산업 육성 및 다양한 수산물 상품을 개발하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ∼2023년 <3년간> 매년 10월중 개최

○ 위 치 : 목포항 및 삼학도 일원

○ 규 모

- 시설 : 주무대, 프린지무대, 어등 터널, 부스, 화장실 등

- 프로그램 : 파시 로드, 어생 그랜드 세일, 풍어파시길놀이, 체험, 불꽃쇼 등

- 홍보 : TV광고, SNS, 언론사, 배너, 각종 홍보물 발행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	202	798	1,000	-
국 비	1,000	101	399	500	-
시 도 비	400	40.4	159.6	200	-
시군구비	600	60.6	239.4	300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ `21. 10. 14. ~ 10. 17. : 2021 목포항구축제 개최(전면 온라인)

○ ‘22. 10. 14. ~ 10. 16. : 2022 목포항구축제 개최

□ 향후계획

○ ‘23. 10. 20. ~ 10. 22. : 2023 목포항구축제 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

고하도 어촌뉴딜 300사업

담당자

해양항만과 강기한(☎270-8328)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양환경 관광화를 통한 어민의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023(3년)

○ 위 치 : 목포시 고하도 일원

○ 규 모 : 공통사업(어촌․어항 현대화사업) 및 특화사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,341백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,341	324	696	11,321	-
국 비	8,639	322	679	7,638	-
시 도 비	1,111	-	-	1,111	-
시군구비	2,591	2	17	2,572	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ `22.  5. : 고하도항 지역역량강화사업 착수

○ `23.  2. : 고하도항 선착장 정비 등 공통사업 착공

○ `23.  6. : 고하도항 용오름 둘레길 정비 착공

□ 향후계획

○ `23. 12. : 특화사업 및 지역역량강화사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

친환경선박 혼합연료 기술개발 및 실증

담당자

지역경제과 김승규(☎3356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국민의 대기환경 개선 요구에 따른 미세먼지 저감 및 기후·환경변화 관련 국제규제 대응 필요

○ 국내 연안 환경에 맞는 친환경 무탄소 배출 연안선박 기술을 개발/적용하여 연안 여객/해운이 밀집한 전남/목포 지역의 경제 활성화 및 미래 먹거리 산업 육성 기반 확보

□ 사업개요

○ 기 간 :  2021. 4. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 목포시 남항 일원(용해동 1059)

○ 규 모 :

◦ 1MW급 친환경 대체연료 해상실증 기술개발 : 259억원

- 해상테스트베드 개발 및 실증 : 169억원

- 육상 연구동 및 시험 준비동 구축 : 90억원

◦ 1MW급 해양환경을 고려한 맞춤형 운항정보 및 신뢰성 검증 기술 개발 : 56억원

- 맞춤형 정보 개발 및 신뢰성 검증을 위한 육상 평가 기법 개발 : 46억원

- 배전반, 인버터 등 상용 기자재 구매 : 10억원

◦ 해상실증 연구동 및 유지보수 시험동 구축 등 : 100억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 41,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	41,482	7,528	10,404	12,509	11,042
국 비	29,000	5,700	7,300	9,200	6,800
시 도 비	4,000	720	880	960	1,440
시군구비	6,000	800	1,490	1,610	2,100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,482	308	734	739	702
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ (기획 경과) 신규 R&D 필요성에 대한 의견 수렴(‘19.11)

* ‘19년 2차 LNG추진선박 연관산업 활성화를 위한 민·관 협의회(해양산업정책관, 약 30개 기관 참여) / LNG-암모니아 혼소 기술개발 및 해상 테스트베드 구축

- 전문가 의견수렴 및 기획연구 수행(‘20.1~, 기계연구원, 에너지기술연구원, 선박해양플랜트연구소 등)

- 전남도, 목포시 등 지자체와 참여방안 협의(‘20.2~3)

- 민간 기업 참여의향서 수렴(‘20.3, 25개 기관)

- 핵심 아이템 도출 및 예산 규모, 연구추진 방법 등의 기획연구 완료(‘20.3)

○ 사업 및 예산 심의(‘20.8, 해양수산부, 과학기술정보통신부)

○ 예산 심의 확정(‘20.12, 기획재정부, 국회)

○ 사업 공고(‘21.1, 해양수산과학기술진흥원)

○ 사업 신청(‘21.2)

○ 사업 선정(‘21.4.6)

○ 해상테스트베드 기본‧상세설계(‘21.4 ~ ’21.12)

○ 운항정보 및 신뢰성 검증기술 시스템 설계(‘21.4 ~ ’21.12)

□ 향후계획

○ 해상테스트베드 연구동 설계(~ ‘21.12), 건축(~ ’23.12)

○ 해상테스트베드 건조, 운항정보 및 신뢰성 검증기술 시스템 구축(‘22.1 ~ ’23.12)

○ 해상테스트베드 최적화(‘24.1 ~ ’24.12)

○ 운항정보 및 신뢰성 검증기술 시범운영(‘21.4 ~ ’21.12)

○ 해상테스트베드 시범운영(‘25.1 ~ ’25.12)

○ 운항정보 및 신뢰성 검증기술 시스템 최적화(‘25.4 ~ ’25.12)

○ 해상 및 육상 테스트베드 운영을 통한 지역기업 기술지원(‘25.12 ~)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2022년 제31회 전국무용제

담당자

문화예술과 김지희(☎270-3225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역무용인의 창작의욕 고취 및 지역무용 활성화 도모

○ 전국무용제의 브랜드 확립 및 무용예술 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 2. 1. ~ 10. 31.【9개월간】

○ 위 치 : 전라남도 및 목포시 일원

○ 내 용

- 16개 광역시도 대표무용단 경연대회 및 시상

- 사전축제, K-월드 발레스타 갈라 무대, 명무, 목포에 담다, 세대공감

- 부대행사(찾아가는 춤 서비스, 국제학술심포지엄, 청소년댄스 페스티벌,

전국학생 무용경연대회, 야외붐업)

- 전시(향토 모용가 기록전시, 축제 미디어 속으로, 포토존)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,500백만원 (잔액 : 14,210천원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,500	-	1,500	-	-
국 비	600	-	600	-	-
시 도 비	450	-	450	-	-
시군구비	450	-	450	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전국무용제 사무실 개소 : ‘22. 2. 26.

○ 지역 예선 : ’22. 5. ~ 6.

○ 개막식 : ‘22. 9. 28.

○ 본선경연 : ’22. 9. 29. ~ 10. 6.

○ 폐막식 : ‘22. 10. 7.

사업명

갓바위 지방정원 조성사업

담당자

공원녹지과 허지수(☎270-8344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정원 인프라가 부족한 서부권에 정원문화 확산 중추 역할 수행을 위한

지방정원 조성 필요

○ 갓바위 지방정원을 조성하여 랜드마크 및 관광자원으로 활용코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025

○ 위 치 : 전라남도 목포시 상동 694번지 일원

○ 규 모 : 139,571㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,000	-	200	-	7,800
국 비
시 도 비	4,400	-	120	-	4,280
시군구비	3,600	-	80	-	3,520
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘22. 8. ~ : 갓바위 지방정원 기본구상 및 실시설계용역 추진

○ ’23. 3. ~ : 정원 지정을 위한 사전 행정절차 이행 중

□ 향후계획

○ ~ ‘24. 6. : 행정절차 이행 및 실시설계용역 완료

○ ‘24. 6. ~ ’25. 12. : 지방정원 조성

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 변경 : 당초 29ha ⇒ 변경 14ha

○ 총사업비 변경 : 당초 138억원 ⇒ 변경 80억원

사업명

수산물 유통물류센터 건립

담당자

수산산업과 박종익 (☎270-3798)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어획량 증가 및 관내 제빙공장 폐업에 따라 부족한 냉동･냉장 시설을 확충하여 산지 유통기능 강화 및 유통 구조 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021 ~ 2022

○ 위    치 : 목포시 죽교동 674-3

○ 민간사업자 : 목포수산업협동조합

○ 총사업비 : 192억원(도비9650%, 시비4825%, 자부담 4825%)

○ 사업규모 : 연면적 5,151㎡, 지상 3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,200	728	18,472	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	9,600	364	9,236	-	-
시군구비	4,800	182	4,618	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4,800	182	4,618	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사 완료

사업명

목포 문화재 야행

담당자

도시문화재과 박유경(☎270-8321)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대문화재가 밀집된 공간에서 목포만의 특색을 살린 야간문화 향유프로그램을 기획·운영하여 도시브랜드 육성 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간

- (소야행) 2022. 7. 29. ~ 7. 30.<2일>

- (대야행) 2022. 9. 23. ~ 9. 25.<3일>

○ 위 치 : 목포근대역사문화공간 일원

○ 규 모 : 문화재 활용 야간 공연, 체험, 전시 프로그램 운영 2회(총 5일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  665 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	665	-	665	-	-
국 비	266	-	266	-	-
시 도 비	79.8	-	79.8	-	-
시군구비	319.2	-	319.2	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022년 목포 문화재 야행 행사 개최 완료

- 문화재 활용 야간 공연, 체험, 전시 프로그램 운영

- 7월 소야행, 9월 대야행 총 5일간 7개 분야 51개 프로그램 운영

- 언론보도 : TV News 12건 외 230건

- 오프라인 관람객 실적 : 98,000여건

□ 향후계획

○ 2023 목포 문화재 야행 행사 개최

- 2023. 10. 14. ~ 10. 15.(2일)

- 2023. 11. 4. ~ 11. 5.(2일)

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경

예 산 과 목							변경 요구액		변경후 예산액
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목	예산액	증	감
도시 문화재과	전통문화보존 및 전승	문화재 보전,전승	문화재 야행	201 일반 운영비	201-01 사무 관리비	72,400		20,000 (국 8,000 도 2,400 시 9,600)	52,400
도시 문화재과	전통문화보존 및 전승	문화재 보전,전승	문화재 야행	207 연구 개발비	207-01 연구 용역비	-	20,000 (국 8,000 도 2,400 시 9,600)		20,000

사업명

전남권 공공어린이 재활의료센터 건립

담당자

노인장애인과 공명진(☎270-3594)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간에서 제공되기 어려운 장애아동에 대한 공공 재활의료서비스를 제공하여 장애아동 가족의 의료수요 충족 필요

○ 장애아동의 특성상 지속적 재활치료가 필요함에도 이동하여 치료 받는 경우가 많아 거주지역을 기반으로 한 공급 필요

□ 사업개요

○ 기  간 : 2021년 9월 ~2024년 7월 ※ 2021년 9월 보건복지부 공모사업

○ 위  치 : 목포중앙병원(전남 목포시 석현동 815-5)

○ 규  모 : 연면적 1,700㎡, 지상3층・지하1층(1층 필로티 주차장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,200	-	400	3,000	3,800
국 비	3,600	-	200	1,500	1,900
시 도 비	2,500	-	100	1,050	1,330
시군구비	1,100	-	100	450	570
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.5%)

○ ‘21. 9. ~ ‘21.12.   보건복지부 공모 선정 및 사업계획 승인

○ ‘21.12. ~ ‘22. 3.   2022년 전남도 지방재정투자심사 의결

○ ‘22. 4. ~ ‘22. 7.   공공 어린이 재활의료센터 설계공모 및 선정

○ ‘22. 7. ~ ‘23. 4.   공공 어린이 재활의료센터 기본 및 실시설계

○ ‘23. 5. ~(진행중)  보건복지부 설계심의

□ 향후계획

○ ‘23. 8. ~ ‘24. 7. 건립공사 계약 및 착공

○ ‘24. 7. ~        준공 및 개원

사업명

목포권 기독교 근대역사관 건립

담당자

문화예술과 이정미(☎270-8429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일제강점기 이후 근대화 시기의 선교, 의료, 교육 등 다양한 사료를 복원·전시함으로써 호남권의 근대 기독교 역사문화를 재조명하고 전시·교육·체험을 위한 복합문화공간 조성

□ 사업개요

○ 기  간 : 2022년 ~ 2025년

○ 위  치 : 북교동 93-8번지 일대

○ 규  모 : 부지 949.4㎡, 연면적 1,565㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,000	-	-	100	7,900
국 비	2,400	-	-	100	2,300
시 도 비	1,200	-	-	-	1,200
시군구비	2,800	-	-	-	2,800
지 방 채
민간자본	1,600	-	-	-	1,600
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021. 11.       중앙투자심사 재검토 통보 *온금동 3-9

○ 2022.  3.       중앙투자심사 조건부 승인 *서산동 21-1

○ 2022.  4. ~ 8.  공공건축 건축기획 용역 추진

○ 2023.  1.       국토교통부 도시재생사업구역 내 건립불가 통보

○ 2023.  1. ~ 5.  북교동성결교회 사업부지 협의 *북교동 93-8 외

□ 향후계획

○ 2023년 제3차 중앙투자심사 의뢰       : ‘23. 5. 29.

○ 중앙투자심사 결과 통보               : ‘23. 8. 15.

○ 공공건축 건축기획용역 재개           : ‘23. 8. ~

○ 일상감사, 계약심사 등 행정절차 이행   : ‘23. 10.

○ 건축 설계공모                        : ‘23. 11. ~‘23. 12.

○ 기본 및 실시설계용역 시행            : ‘24. 1. ~‘24. 5.

○ 건설공사 시행                        : ‘24. 6. ~‘25. 8.

○ 시운전 및 콘텐츠 구축                : ‘25. 9. ~‘25. 12.

□ 사업변경 내역

○ 총괄 변경사항(22. 12월 말 기준)

구 분	당 초	변 경
사업비	79억원(국 23, 지방 40, 민간 16)	80억원(국 24, 지방 40, 민간 16)

사업명

용해 생태체험시설 조성사업

담당자

관광과 배준희(☎270-8216)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이색적인 관광시설 확충으로 갓바위 일원 기존 관광시설과 연계 가족단위 즐길 수 있는 체험공간 실내체험놀이시설 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 목포시 용해동 11-11번지 일원(자연사박물관 인근)

○ 규 모 : 건축물 1동 신축[지상2층, 지하1층, 연면적 1,627.2㎡]

실내체험놀이시설 1조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000	3,900	1,700	1,400	-
국 비	500	-	500	-	-
시 도 비	1,500	700	600	200	-
시군구비	5,000	3,200	600	1,200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2023.  1.  9. : 용해 생태체험시설 조성사업 착공

○ 2023.  3. 30. : 지하층 터파기 공사 완료

○ 2023.  4. 13. : 지하층 바닥 단열재 및 기초 철근배근 완료

○ 2023.  5. 16. : 실내체험놀이시설 제작 및 설치 용역 입찰공고 ※협상의 의한 계약

○ 2023.  7. 18. : 실내체험놀이시설 계약체결 ※ 우선협상자와 1,2차 협상완료

□ 향후계획

○ 2023. 10. : 용해 생태체험시설 준공

○ 2023. 11. : 실내체험놀이시설 제작 및 설치 완료

사업명

긴급치료병상 증축공사

담당자

보건위생과 유선경(☎270-8911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남 서남권 최초의 긴급치료병상 증축을 통해 지역내 감염병 발생시

신속한 대응과 지역 내 의료 안전망 및 공공의료 체계 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년~2024년

○ 위 치 : 목포시의료원 본관(정문) 좌측면(별동 증축)

○ 규 모 : 지상3층(연면적 2,168m2), 철근콘크리트 구조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,800	-	20	3,591	6,189
국 비	2,900	-	10	1,795.5	1,094.5
시 도 비	420	-	-	420	-
시군구비	2,480	-	10	1,375.5	1,094.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	4,000	-	-	-	4,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.5%)

○ ‘21~’22년 기능특성화 지원 사업계획서 제출 및 선정            : ‘21.5.

○ 보건복지부 호흡기 및 긴급치료병상 30병상 58억원 지원 확정   : ’22.3.

○ 마스터플랜 반영된 최종 사업승인 및 사업비 확정(58➝98억원)   : ‘22.6.

○ 기능보강사업 도비 지원 건의(420백만원 확정)                  : ’22.8.

○ 설계공모 전 목포시 설계용역 계약심사 및 심사위원 선정   : ‘22.10.~12.

○ 긴급치료병상 증축공사 기본 및 실시설계 공모시행         : ’23.3.~6.

○ 긴급치료병상 설계공고 심사위원회 평가 및 당선작 선정    : ‘23.6.

□ 향후계획

○ 설계용역 계약 및 기본설계 심의신청            : ‘23. 8.

○ 실시설계 완료 및 조달청 설계 적절성 검토 신청 : ‘23. 10.

○ 호흡기 및 긴급치료병상 증축공사 준공 예정     : ‘24. 12.

사업명

2022 목포뮤직플레이

담당자

문화예술과 장경아(☎270-8991)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대 대중음악의 본거지인 목포만의 음악축제를 통해 목포가 가진 음악자산의        차별성을 재조명함으로써 명실상부 음악의 도시로의 기틀을 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. 30.(금) ~ 10. 2.(일)【3일간】

○ 위 치 : 갓바위 문화타운 일원

○ 내 용 : 전국오디션대회, 전국댄스배틀, TOP 뮤지션 공연, 난영재즈극장,               목포 음악사 콘텐츠 전시관, 휴(休)공간 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,500	-	1,500	-	-
국 비	750	-	750	-	-
시 도 비	300	-	300	-	-
시군구비	450	-	450	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 목포뮤직플레이 기본계획 수립 : ‘22. 2.

○ 투자심사(도) : ’22. 3. ~ 5.

○ 세부실행계획 수립 및 행사대행용역 착수 : 2022. 7. ~ 8.

○ 목포뮤직플레이 축제 추진 : 2022. 9. 30. ~ 10. 2.

○ 목포뮤직플레이 성과평가 및 향후 발전방향 모색 : 2022. 11. ~ 12.

□ 향후계획

○ 2024 목포 뮤직플레이 개최 준비 및 행사 개최

사업명

문화도시 사업

담당자

문화예술과 박은경(☎270-8566)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민주체의 문화활동이 생활문화 콘텐츠로 연결될 수 있는 매개체 마련

○ 누구나 문화적 삶을 누리는 문화복지 실현

○ 문화의 교류와 융합이 일어나는 문화항구 도시브랜드 가치 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 1월 ∼ 2026년 12월(5년)

○ 위 치 : 목포시  전역

○ 규 모 : 6개 분야, 26개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비	9,900	-	1,131	1,869	6,900
시 도 비	2,970	-	339	561	2,070
시군구비	6,930	-	792	1,308	4,830
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  1차년도 / 20 %)

○ 지방재정영향평가, 지방재정투자심사 등 행정절차 이행

○ 문화다방, 꼼지락실험실 등 시민 중심 문화도시 조성사업 추진

○ 문화도시위원회, 시민설명회 등 개최

□ 향후계획

○ 문화도시 문화거점 공간 조성사업 추진

○ 문화항구페스타, 예아리오픈스튜디오 등 22개 사업 추진

○ 문화도시위원회, 시민거버넌스 간담회 등 추진

□ 사업변경 내역 ※ 세부내역 붙임파일 참조

○ 사업규모 : 6개 분야 26개 사업 → 5개 분야 22개 사업

□ 당초 사업내역

사업구분	사 업 명	사업 주요내용
문화도시 경영체계 구축사업	목포문화도시센터 구축	민간전문가 중심의 문화도시 추진 운영조직
	목포문화도시 R&D	문화도시 콘텐츠 연구개발/평가/모니터링
	문화항구 조타실	전문성 확보를 위한 시민 거버넌스 발굴/아카이브 구축
문화인재 양성사업	문화 갯물학교	문화 기획자, 문화 큐레이터, 로컬 크리에이터, 미디어크리에이터 양성을 통한 문화도시 주체자 발굴
	문화마리나 양성	순수 아마추어 시민 문화 활동가 육성
	목포 장인대학	지역 활동 가능한 인재 양성/취·창업 지원
문화가치 발굴활용 사 업	문화다방	민간공간 활용, 생활밀착형 문화공간 조성과 작품전시 및 판매가 이루어지는 문화향유 및 비즈니스 공간조성
	토속문화 리바이벌	목포 토속문화발굴, 보존 전승과 문화체험 콘텐츠 개발을 통한 문화 재연
	아트 탐험대	서남권 문화교류 탐방 및 세계화
	디지털문화여지	23개 동 온, 오프라인 문화정보 프로그램을 기반으로 한 목포문화정보 토털 커뮤니티 조성
지역문화 활 성 화 사 업	골목상권 챌린지	문화교류와 융합을 통한 새로운 문화 창조 지원 시민예술가-소상공인 문화예술 매칭 지원
	생활문화 세포 발굴	생활 속 문화향유를 위한 공동체 활동 촉진
	다순구미 문화마당	골목, 광장, 거리에서 만들어가는 문화소외계층을 위한 따수운 지역예술문화 형성(23개 지역)
	섬 in 어게인	목포권 도서 지역의 문화적 가치(설화, 구전동요, 놀이)를 구현하여 창작활동 지원
	문화항구 페스타	시민주도형축제 및 지역문화자원을 활용한 지역특화 축제 구성 (23개 지역콘텐츠 활동)
	비주류 회담	비주류문화의 활성화를 위한 활동지원(타투, 독립영화 등)
	희망 사다리	누구나 즐길 수 있고, 누구나 사회적 영향력을 발휘할 수 있는 평등한 문화도시가 되는 지역사회 구현
	나는‘나비’다	문화계층의 다양성을 위한 활동 지원(다문화, 새터민 등)
	목포 레스트	자연생태/반려동물과 공생하는 생태문화 콘텐츠 개발
	뜬금포 기획단	각계각층의 뜬금없는 생각으로 모인 시민공모사업
	수요문화외식회	지역 세대별 문화향유 기회 제공 및 지역 문화브랜드 구축
도시혁신 및 지역경제 활 성 화	목포 문화밸리 조성사업	목포특화 브랜드개발 및 문화 창업을 통한 청년, 중년 인구유입과 지속가능한 문화도시 기반 사업
	문화파시 플랫폼	지역문화산업 생태계 구축을 위한 서남권 문화 쇼핑몰
	꼼지락 실험실	목포만의 콘텐츠 개발을 위한 시민주도 문화적 실험의 장
문 화 적 도시재생 사 업	예아리 오픈 스튜디오	대중예술 및 창작놀이문화 거점 공간 형성 빈집에 예술가 오픈 작업 공간 지원
	木마르뜨 언덕 조성	아마추어 작가들과 함께하는 문화예술 거리 조성

□ 변경 사업내역

사업구분	사 업 명	사업 주요내용
기반구축 및 거버넌스	목포문화도시센터 구축	민간전문가 중심의 문화도시 추진 운영조직
	문화도시 R&D	시민추진단, 협의체, 문화통장 등 운영
	문화항구 조타실	통합브랜드 개발, 예향문화기록단 등
문화공간 조성사업	목마르트거리	목포형 목마르트 거리 조성을 통한 시민의 문화향유 기회 제공 및 예술가의 문화 활동 지원, 지역경제 활성화
	꼼지락실험실	시민들의 문화생각을 실험해 볼 수 있는 공간 지원을 통한 시민 문화 활동 지원 및 시민 문화예술활동 여건 개선
	예아리오픈스튜디오	예술인 창작공간 조성 및 예술활동 지원, 예술가와 시민의 교류와 소통의 장 형성
문화시민 양성사업	문화갯물학교	기획자, 미디어 활동가 등 문화 전문인력 양성
	생활장인대학	지역 생활 장인의 가치 발굴 및 문화적 활동 기획 제공
	문화다방	지역 내 문화예술단체 사업비 지원을 통한 문화공간 조성 및 시민 문화향유 기회 제공
	문화치유사업	다문화, 시니어 등 문화 소외계층 문화활동 지원
	항구문화지원	목포의 대표 문화자원인 항구를 기반으로 문화콘텐츠 제작 및 활용
	목포레스트	생태문화, 바다 환경 콘텐츠 발굴 사업
	미래문화준비단	어린이, 청소면 대상 찾아가는 문화프로그램
	목포문화도시아카데미	시민대상 세대별, 분야별 문화 교양강좌 운영
문화 콘텐츠 개발 사업	토속문화 리메이크	목포만의 토속문화 발굴 및 계승 발전을 위한 문화콘테츠화 추진
	섬 in 어게인	목포 관내 섬 고유의 문화 자원 아카이빙 등을 활용한 문화콘텐츠 개발을 통해 문화교류 추진
	목포문화디지도	문화 정보 토탈 커뮤니티 플랫폼 조성 및 시민 문화 접근성 강화, 목포 문화예술 활동 및 문화공간 등 문화정보 제공 플랫폼 운영
	뜬금포 기획단	시민의 뜬금없는 목포 문화 생각 지원을 통한 다양한 문화생태계 발굴 및 시민 문화 활성화
	특화콘텐츠 제작	목포 문화자원을 활용한 목포만의 특화콘텐츠 개발을 통한 문화도시 목포의 지역 정체성 강화 및 지역경제 활용화
문화도시 브랜드 확산사업	문화교류 탐험대	타 도시, 기관, 기업 간 문화교류 사업
	목포문화의 날	문화 소외지역에 문화향유 기회 제공을 통한 문화진흥 사업
	문화항구 페스타	문화도시 성과 발표를 중심으로 한 시민 참여형 문화축제

사업명

춤추는 바다분수 시설 기능개선 사업

담당자

관광과 정승욱(☎270-8580)

□ 사업목적 및 필요성

○ 춤추는 바다분수 설치 13년이 경과됨에 따라 시설 노후화 및 공연 참신성 부족 등의 문제가 대두되어 분수 시설에 대한 기능 업그레이드 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2024

○ 위 치 : 목포시 미항로 115 앞 해상 150m 지점

○ 규 모 : 춤추는 바다분수 시설(전폭 138m, 전장 59.55m, 전고 13.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,506백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,506	-	103	3,241	5,162
국 비	4,253	-	103	1,646	2504
시 도 비	1,701	-	-	638	1,063
시군구비	2,552	-	-	957	1,595
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022. 10. : 전라남도 지방재정투자 심사 완료

○ 2023.  4. : 춤추는 바다분수 시설 기능개선사업 기본설계 완료

○ 2023.  7. : 기능개선사업 용역 계약 및 착수

□ 향후계획

○ 2023. 8. : 부력체 상부 분수설비(노즐, 에어젯 등) 철거

○ 2023. 9. : 부력체 수리 도크 입고 및 시설물 보수

○ 2024. 2. : 기능개선 완료 및 시운전

사업명

친환경선박 시험평가 실증기술 개발 사업

담당자

지역경제과 김승규(☎3356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국민의 대기환경 개선 요구에 따른 미세먼지 저감 및 기후·환경변화 관련 국제규제* 대응 필요

○ 국내 연안 환경에 맞는 친환경 무탄소 배출 연안선박 기술을 개발/적용하여 연안 여객/해운이 밀집*한 전남/목포 지역의 경제 활성화 및 미래 먹거리 산업 육성 기반 확보

○ 본 사업 총괄관리 및 친환경 연료‧추진시스템의 본격적인 선박적용에 앞서 육상 시험평가 설비 및 기술 확보, 친환경연료(바이오‧재생유, 암모니아)에 대한 생산, 공급 및 선박활용 기술‧기준 마련 등 친환경 신기술의 시험 및 실증기반 확보

□ 사업개요

○ 기 간 :  2022. 7. ~ 2031. 12.

○ 위 치 : 목포시 남항 일원(용해동 1059)

○ 규 모 :

◦ 전기추진시스템 육상 시험평가 기술 실증 : 309억원

- 선박 추진 부하 모사 시험설비 개발/구축 : 63억원

- 전력 손실 15% 이하 저전력 시험설비 구축 : 112억원

- 선박 운항프로파일 모사 : 10억원

- 전기추진시스템 시험 평가 관련 지침 개발, 제도 개선 : 4억원

- 30MW급 국내 최대 규모 전기추진시스템 육상 평가 인프라 구축 : 120억원

◦ 암모니아 연료 선박 적용을 위한 생산, 안전 활용기술 개발 : 50억원

- 저압(<50 bar) 암모니아 합성율 및 안전성 확보 : 30억원

- 암모니아 연료공급 시스템 벨브트레인 동적 제어 및 성능 모니터링 기술 개발 : 17억원

- 암모니아 핵심 물성 데이터베이스 및 예측 SW 개발 : 3억원

◦ 바이오 및 재생 연료와 MFO 혼유 기준 개발 : 7억원

- 바이오연료 및 해양폐기물 재생유와 MFO 혼유 시험 및 지침서 개발 : 7억원

◦ 친환경선박 전주기 혁신기술개발 사업 총괄 관리 : 51억원

- 사업단 운영 내규 제·개정, 홈페이지 개발 및 운영 등 : 26억원

- 내역사업별 진도 및 성과 관리 : 15억원

- 유관기관 협조 및 사업간 기술개발 지원, 로드맵 개발 등 : 10억원

◦ 인건비, 운영비 및 간접비 등 : 40억원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 45,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	45,709	-	3,090	10,472	32,147
국 비	32,397	-	3,001	8,038	21,358
시 도 비	3,600	-	-	600	3,000
시군구비	8,400	-	-	1,400	7,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,312	-	89	434	789
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ (기획 경과) 산업부-해수부 다부처 예타 기획연구 수행 (‘20. 6. ~ ’21. 2.)

- 전문가 의견수렴 및 기획연구 수행(‘21. 2. ~ ’21. 2., 선박해양플랜트연구소, 한국선급 등)

- 민간 기업 참여의향서 수렴(‘20. 10., 45개 기관)

- 예비타당성 조사 통과(‘21 .6.)

- 내역사업 구성 및 RFP 확정(‘21. 12.)

- 전남도, 목포시 등 지자체 참여방안 협의(‘21. 10. ~ ’22. 3.)

- 내역사업 민간 기업 참여의향서 수렴(‘22. 3., 12개 기관)

○ 사업 및 예산 심의(‘21. 8., 해양수산부, 과학기술정보통신부)

○ 예산 심의 확정(‘21. 12., 기획재정부, 국회)

○ 사업 공고(‘22. 2., 해양수산과학기술진흥원)

○ 사업 신청(‘22. 4.)

○ 사업 선정(‘22. 5.)

○ 전기추진시스템 시험평가 설비 기본 설계(‘22. 7. ~ ’22. 11.)

□ 향후계획

○ 전기추진시스템 요소 기술 개발 및 운항프로파일 분석(‘22. 7. ~ ’24. 12.)

○ 전기추진시스템 시험평가 설비 구축(‘23. 1. ~ ’25. 1.)

○ 전기추진 시스템 관련 국내 기업 기술지원(‘25. 1. ~ ’31. 12.)

○ 암모니아 활용기술 개발(‘22. 7. ~ ’26. 12.)

○ 혼유기준 개발(‘22. 7. ~ ’24. 12.)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

노벨평화공원 삼학도 테마경관 조성사업

담당자

공원녹지과 임성기(☎270-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼학도공원 내 아름다운 테마경관 조성을 통한 관광객과 시민들에게 다양한 볼거리를 제공 관광도시 랜드마크로써 위상 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023년

○ 위 치 : 삼학도근린공원 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,400	368	102	2,930	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,700	184	60	1,456	-
시군구비	1,700	184	42	1,474	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 삼학도 호안수로 꽃나무 식재 : 2020년 / 212본

○ 중삼학도 꽃누리 섬 조성 : 2020년 / 수선화, 맥문동 등 6종

○ 삼학도 테마경관 활성화방안 연구용역 추진

○ 실시설계 및 공원조성계획 변경 용역 발주(‘22. 11 ~ ’23. 3)

□ 향후계획

○ 삼학도 테마경관 조성사업 단계별 사업추진 : 2023. ~2023.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 당초 2019 ~ 2022년 ⇒ 변경 2019 ~ 2024년

사업명

목포 해변맛길 30리 조성

담당자

공원녹지과 임성기(☎270-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포시의 아름다운 해변풍광을 연결하여 관광객 및 시민들에게 도보여행 바닷길을 제공하고 문화, 역사 등 주변 관광자원과 연계한 낭만과 맛이 있는 도보 관광자원을 통해 관광도시 이미지 향상 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024년

○ 위 치 : 목포 평화광장~삼학도~목포항~목포해양대학교

○ 규 모 : 12km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	2,000	3,005	2,395	2,600
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	1,000	1,502.5	1,197.5	1,300
시군구비	5,000	1,000	1,502.5	1,197.5	1,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 목포 해변맛길 30리 조성(1단계) 2, 3구간 개통

○ 목포 해변맛길 30리 조성(2단계) 5구간 추진중

□ 향후계획

○ 목포 해변맛길 30리 잔여(1, 4)구간 사업추진 – 2023 ~ 2024년

○ 기 계통구간 보수․보강공사 추진

※관광거점도시 추진 “바닷가 산책길” 통합디자인 개발 용역결과 활용 검토

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : 당초 2020 ~ 2022년 ⇒ 변경 2020 ~ 2024년

사업명

유달동 대반마을 도시취약지역

담당자

도시재생과 김은향 (☎270-3686)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 취약지역 주민의 기본적인 생활여건 개선을 위해 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2022. 12. <4년>

○ 위 치 : 전남 목포시 죽교동 488-13번지 일원

○ 규 모 : A=49,298㎡, 5개 분야 16개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,539백만원(국 3,177, 도 408, 시 954)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,539	362	516	3,661	-
국 비	3,177	314	493	2,370	-
시 도 비	408	14	-	394	-
시군구비	954	34	23	897	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)

○ ‘21.  3. : 마을안길 조성공사 실시설계 용역 착수

○ ’21.  7. : 대반마을 내 지적재조사 사업 완료

○ ’21. 12. : 마을안길 및 커뮤니티센터 부지 보상계획 보고

□ 향후계획

○ ’22.  4. : ‘학교법인 석산학원’ 부지 보상협의 방문 및 감정평가 실시

○ ‘22. 7. : 토지 및 부분 편입 지장물 협의보상 추진

○ ’22. 8. : 도시계획시설(도로 등) 결정 고시·공람 후 세부사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

관광거점도시 육성사업

담당자

관광거점도시추진단 김효상 (☎270-8567)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방한 관광객의 지방방문 확산을 견인하는 ‘지방 대표도시 육성’

○ 외국인 관광객이 가고 싶은 ‘모델도시 육성’

○ 지역의 창의적 역량을 강화하고 지속가능한 ‘지역주도형’ 관광 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2025년

○ 위 치 : 5개 권역(원도심, 삼학도+남항, 갓바위, 평화광장, 고하도), 목포시

포함 서남권 9개 시·군

○ 규 모 : 954.8억원(국비 477.4, 도비 191, 시비 286.4)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 954.8백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	95,480	4,300	13,000	10,500	67,680
국 비	47,740	2,150	6,500	5,250	33,840
시 도 비	19,100	860	2,600	2,100	13,540
시군구비	28,640	1,290	3,900	3,150	20,300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2020년 : 2020년 8개사업 추진 완료

○ 2021년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중(완료11개, 추진6개, 총17개사업)

○ 2022년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중(완료6개, 추진7개, 총13개사업)

○ 2023년 : 관광거점도시 육성사업 추진 중(총18개 사업 추진중)

사업명

구)목포세관문화재권역 관광활성화 사업

담당자

도시문화재과 노우균(☎270-8291)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구 목포세관 본관 터는 세관청사 건물의 흔적들로서 보존처리 후 노출전시

시설을 조성하여 역사문화자산 콘텐츠 제공이 필요함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2024년(4년)

○ 위 치 : 항동 6-8번지 외 1필지, 서산동 23-36번지 일원,국가 및 등록

문화재 20개소 일원, 도지정 문화재 9개소 일원

○ 규 모 : 구 목포세관 1,848㎡, 국가 및 등록문화재·도지정문화재 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,947	-	947	1,000	2,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1973.5	-	473.5	500	1,000
시군구비	1973.5	-	473.5	500	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 구 목포세관 문화재권역 기본계획 및 실시설계 용역 진행 중

□ 향후계획

❍ ‵23.  9. : 전라남도 계약심사, 건설기술심의 등 행정절차 이행

❍ ‵23. 10. : 구 목포세관 본관 터 보호각 건립 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 당초 2021년 ~ 2022년(2년) → 변경 2021년 ~ 2025년(4년)

사업명

삼학도 천년의 숲 산림공원 조성

담당자

공원녹지과 임성기(☎270-3514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대삼학도와 중앙공원을 연결하는 불량경관 구간 재정비를 통한 테마형 천년의 숲을 조성 삼학도공원 관광 랜드마크 공간으로 조성하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023년

○ 위 치 : 대삼학도 일원(난영공원~중앙공원)

○ 규 모 : 3.5ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,900	-	41	1,859	-
국 비	950	-	20.5	929.5	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	950	-	20.5	929.5	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 삼학도 천년 숲 산림공원 조성사업 공사발주 추진 중

※삼학도 테마경관 조성사업 일환사업으로 활성화 방안 연구용역 병행

□ 향후계획

○ 삼학도 천년숲 산림공원 조성 완료 및 유지관리 : 2023. 12. ~ 지속

사업명

고하도 해상데크 보행약자 진출입 개선사업

담당자

관광과 이광윤(☎270-8217)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경사도 높은 계단으로 연결된 해상데크의 거동 가능한 보행약자에 대한 이동편의 제공 및 접근성 향상을 위한 진출입 여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023

○ 위 치 : 목포시 달동 산191-4(고하도 해안 일원)

○ 규 모 : 경사형 엘리베이터 설치 L=54m(20인승)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,350	1,110	385	855	-
국 비	1,100	730	370	-	-
시 도 비	950	190	10	750	-
시군구비	300	190	5	105	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ `20.  9. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ `22.  2. : 해역이용 및 공유수면허가

○ `22.  2. : 토목공사 착공

○ `23.  6. : 엘리베이터 안전검사 실시

□ 향후계획

○ `23. 9. : 엘리베이터 개통 운행 및 사업준공

사업명

목포 어묵 세계화 기반구축 및 육성전략

담당자

수산진흥과 황기범(☎270-3607)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 성장하고 있는 어묵시장 개척을 목표로 풍부한 수산물을 활용한 고부가        가치산업 육성을 통해 전국 제1의 수산식품도시 선도

○ HACCP 시설을 갖춘 임대형공장 등 각종 인프라를 구축하여 관련 기업 및       창업 육성을 통한 지역경제 활성화와 일자리 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 목포시 대양동 1180-17(대양산단)

○ 규 모 : 부지 5,610㎡, 건축면적 2,640㎡(1층 예정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	1,559	527	464	7,450
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	52	485	232	4,231
시군구비	5,000	1,507	42	232	3,219
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2021년 전남형 지역성장 전략사업 최종선정 : ‘20. 8.

○ 2020년 2차 전라남도 지방재정 투자심사 : ‘20. 11.

○ 목포어묵 HACCP 가공공장 구축을 위한 부지매입 : ‘21. 6.

○ 목포어묵사업 기본계획 수립 용역 : ‘21. 9. ~ ‘22. 5.

○ 운영방안 검토 및 기본계획 보완 : ‘22. 12. ~ ‘23. 2.

○ 기본 및 실시설계 용역 계약 : ‘23. 6.

□ 향후계획

○ 목포어묵 HACCP 가공공장 건립사업 기본 및 실시설계 용역 : ‘22. 7. ~

○ 목포어묵 HACCP 가공공장 착공 : ‘23. 1.

사업명

목포해상W쇼(목포 해상판타지쇼 운영)

담당자

관광과 박진희(☎270-8431)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 대표 체류형 야간관광 콘텐츠로 자리매김함에 따라 더욱 업그레이드 된 콘텐츠 운영으로 국제해양 관광도시 브랜드 가치 제고 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년 <3년간>

○ 위 치 : 평화광장 춤추는 바다분수 해상무대 일원

○ 규 모 : 해상무대 뮤지컬 ＋ 춤추는 바다분수 + 불꽃쇼

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,150	866	684	800	-
국 비	1,575	433	342	400	-
시 도 비	629	173	136	160	-
시군구비	946	260	206	240	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ `22. 9월 ~ `22. 12월, 목포해상W쇼 총 10회 공연 운영

(목포뮤직플레이 2회, 목포항구축제 2회 특별운영 별도)

○ 2023 목포해상W쇼 기본계획 수립                  : ‘22. 12월

○ 2023 목포해상W쇼 사전규격 공개 및 입찰공고      : ‘22. 12월

○ 2023 목포해상W쇼 협상 및 대행사 선정            : ‘23. 4월

○ 2023 목포해상W쇼 세부실행계획수립               : ‘23. 4월

○ 2023 목포해상W쇼 개최                           : ‘23. 4월~11월

□ 향후계획

○ 2023 목포해상W쇼 개최                           : ‘23. 4월~11월

사업명

목포 항구축제

담당자

관광과 정경란(☎270-8441)

□ 사업목적 및 필요성

○ 목포항과 삼학도를  중심으로 바다위 어시장이었던 파시(波市) 장터를 재현하며         만선의 기쁨이 가득한 목포를 축제로 구현

○ 지역 수산물과 수산업의 발전을 유도하고, 지역브랜드 가치를 높여 관광   산업 육성 및 다양한 수산물 상품을 개발하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ∼2023년 <3년간> 매년 10월중 개최

○ 위 치 : 목포항 및 삼학도 일원

○ 규 모

- 시설 : 주무대, 프린지무대, 어등 터널, 부스, 화장실 등

- 프로그램 : 파시 로드, 어생 그랜드 세일, 풍어파시길놀이, 체험, 불꽃쇼 등

- 홍보 : TV광고, SNS, 언론사, 배너, 각종 홍보물 발행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	202	798	1,000	-
국 비	1,000	101	399	500	-
시 도 비	400	40.4	159.6	200	-
시군구비	600	60.6	239.4	300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ `21. 10. 14. ~ 10. 17. : 2021 목포항구축제 개최(전면 온라인)

○ ‘22. 10. 14. ~ 10. 16. : 2022 목포항구축제 개최

□ 향후계획

○ ‘23. 10. 20. ~ 10. 22. : 2023 목포항구축제 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

죽교동 샘골마을 도시취약지역

담당자

도시재생과 조기훈

(☎270-3643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 취약지역 주민의 기본적인 생활여건 개선을 위해 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 24 ~ 2024. 12. <4년>

○ 위 치 : 전남 목포시 죽교동 86-11번지 일원

○ 규 모 : A=24,271㎡, 6개 분야 18개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,473백만원(국 3,131, 도 403, 시 939)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,473	-	87.5	1,347.5	3,038
국 비	3,131	-	87.5	916.5	2,127
시 도 비	403	-	-	130	273
시군구비	939	-	-	301	638
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ ‘21.  3. : 공모사업 대상지 선정

○ ‘21.  8. : 마스터플랜 수립 용역 착수

□ 향후계획

○ ‘22.  5. : 마스터플랜 제출(시⇒전라남도), 관계부서 및 유관기관 협의

○ ‘22. 10. : 국토부 검토위원회 상정 및 마스터플랜 수립 확정

○ ‘23. ~  : 우선 사업(공폐가 정비 등) 및 세부사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

용당1동 공영주차장 주차타워 조성

담당자

교통행정과 이정훈(☎270-8293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상가 및 다세대 주택 밀집 구역이며, 지역 내 가장 활성화되고 있는 재래시장 주변 구역으로 주차 공간이 부족하여 주택가와 도로변 주차로 인한 교통체증 및 무질서로 주변 시민들의 불편 해소를 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 01. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 용당동 965-25번지 일원(용당1동 행정복지센터 옆 공영주차장)

○ 규 모 : 지상 3층(4단), 주차대수 200대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	-	2,800	800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,800	-	1,300	500	-
시군구비	1,800	-	1,500	300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ ’20. 11. : 2021~2025 중기지방재정계획 반영

○ ‘21.  9. : 지방재정 투자심사

○ ‘21. 12. : 주차타워 조성사업비 반영(’22년 본예산/도 15억원, 시 15억원)

○ ‘22.  2. : 실시설계용역 착수 *일시정지 중 : ’22. 4. 23. ~ 현재

- 사업효과 제고 요구(주차면 추가 확보) : 사유지 1개 필지(165㎡) 매입 필요

○ ‘22.  4. : 주민설명회 개최(4.7/용당1동 행정복지센터)

○ ‘22.  6. : 토지매입 등을 위한 행정절차 추진

- 도시관리계획(변경), 보상, 사업계획(변경) 등

□ 향후계획

○ ’23. 3. ~  8. : 실시설계 및 실시계획 인가 고시 완료 및 행정절차이행(토지보상 등)

○ ‘23. 9. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

사업명

서남권 뮤지엄페어

담당자

자연사박물관 김아름(☎270-4105)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서남권 박물관‧미술관 전시 및 체험 등 다채로운 프로그램을 조성 개최       하여 관광 시너지 효과를 창출코자 함

○ 문화적 소외지역인 서남권 지역민들을 위해 서남권 박물관‧미술관이 모여       콘텐츠 개발, 문화 갈증 해소로 지역 간의 불균형 해소

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021 ~ 2024 (4개년)

○ 참여기관 : 서남권 7개 박물관‧미술관 참여

○ 위    치 : 목포자연사박물관 일원

○ 사업내용 : 서남권 박물관‧미술관 콘텐츠 기반 전시‧체험프로그램 및

부대행사 기획 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		2021년	2022년	2023년	2024년 이후
계	700	100	200	200	200
국 비	350	50	100	100	100
시 도 비	140	20	40	40	40
시군구비	210	30	60	60	60
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2021년 서남권 뮤지엄페어 개최 : 2021. 10. 8. ~ 10. 10.

○ 2022년 서남권 뮤지엄페어 개최 : 2022. 9. 30. ~ 10. 2.

□ 향후계획

○ 2023년 서남권 뮤지엄페어 개최 : 2023. 10. 13. ~ 10. 15.

○ 2024년 서남권 뮤지엄페어 개최 : 2024. 10월 중

사업명

스마트 관망관리 인프라 구축사업

담당자

수도과 최모경(☎270-3548)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수돗물 공급 과정에 감시체계를 구축하여 사고발생을 방지하고 사고 발생 시       신속한 대응이 가능한 인프라를 구축하기 위함.

□ 사업개요

○ 기  간 : ‘22. 1. ~ ’23. 12.

○ 위  치 : 목포시 급수구역 일원

○ 사업량 :

- 수질관리(재염소투입설비, 정밀여과장치)

- 수질감시(수질자동측정장치)

- 위기대응(관세척인프라, 자동(원격)드레인)

- 재발방지(유량 □ 수압 감시, 스마트미터링, 관로인식체계)

- 신뢰제고(워터코디, 워터닥터)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,448백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,448	-	989	2,459	-
국 비	2,414	-	692	1,722	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,034	-	297	737	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ ‘22.  2. : 실시설계 용역 착수

○ ‘22.  5. : 실시설계 용역 완료 및 스마트미터링 자재구매 및 설치 추진

○ ‘22. 12.

- 다항목 수질계측기 외 6개 인프라 항목 발주

- 스마트미터링 설치 완료(2,556EA)

□ 향후계획

○  ‘23.  2. : 정밀여과장치 발주 추진

○  ’23.  7. : 관세척 인프라 외 1개 인프라 발주 추진

○  ‘23. 12. : 스마트 관망관리 인프라 구축 완료

사업명

목포시 고하도 해안동굴 탐방로 조성사업

담당자

관광과 이광윤(☎270-8217)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고하도 해상데크 접근성 향상과 해안동굴을 관광 컨텐츠로 활용하여

관광 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2024

○ 위 치 : 고하도 해상(해상데크2차분~뒷도랑 마을)

○ 규 모 : 해상데크 L=1,000m, B=2m, 쉼터 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	-	100	3,900	1,000
국 비	1,000	-	-	1,000	-
시 도 비	1,500	-	-	1,500	-
시군구비	2,500	-	100	1,400	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ `22. 11. : 실시설계용역 착수

○ `23.  4. : 특허, 신기술 등 계약심사(전라남도)

□ 향후계획

○ `23.  8. : 건설기술 심의 등 행정절차 이행

○ `24.  1. : 사업 발주

사업명

산업단지 복합문화센터 건립 사업

담당자

지역경제과 백윤호(☎8772)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지에 부족한 편의시설 확충을 위해 다양한 시설이 집적된 복합문화센터를 건립하여 청년 유입 유도 및 근로자 복지환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 :  2020. 6. ~ 2021. 12.

○ 위    치 : 연산동 1300번지(삽진산단. 現 공용주차장, 3,586㎡)

○ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2025. 5.(3년간)

○ 사 업 비 : 3,850백만원(국비2,70070% 도비3459% 시비80521%,)

○ 건축규모 : 본관 2층, 997㎡

- 로비(주 출입구) : 개방쉼터

- 1층 : 카페 및 북카페, 식당(푸드코트), 관리 사무실

- 2층 : 스포츠센터(헬스장, 요가실), 다목적 전시 및 공공 회의장

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,850	-	0	181	3,669
국 비	2,700	-	0	128	2,572
시 도 비	345	-	0	16	329
시군구비	805	-	0	37	768
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 공모사업 신청 및 선정 (한국산업단지공단)  : ‘22. 1. ~ 3.

○ 협약 체결 (한국산업단지공단)             : ‘22. 5.

○ 공유재산 심의 및 지방재정투자심사       : ‘22. 8.

○ 공유재산 관리계획 의회 심의             : ‘22. 9.

○ 건축 기획 용역(국가공공건축기획센터)     : ‘22. 10. ~ ‘23. 2.

○ 건축위원회 심의(건축행정과)              : ‘23. 2.~3.

○ 건축 설계공모                           : ‘23. 4.~6.

○ 건축기본 및 실시설계 용역               : ‘23. 6.~‘24.1.

□ 향후계획

○ 공사 착공                               : ‘24. 2.

○ 공사 준공 및 센터운영                   : ‘25. 상반기

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

전국체전 대비 부주산테니스장 개보수

담당자

전국체전추진단 신윤철(☎270-4459)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국체전을 대비하여 대한테니스협회 공인규정에 적합하도록 테니스장 개보수하여 향후 안전한 체육활동 여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘23. 12. ~ ‘23. 7.

○ 위 치 : 목포시 옥암동 636-1번지 일원

○ 규 모 : 하드코트 12면 조성 및 부대시설 설치(지상2충, 341.73㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,700	-	750	2,950	-
국 비	450	-	450	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,250	-	300	2.950	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 하드코트포장 시공(토목) 및 옥상방수 시공(건축)

○ 기타 잔손보기

□ 향후계획

○ ’23. 7월 준공

○ ‘23. 8월 사전경기 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

구 목포공립심상소학교

실감콘텐츠 제작 및 체험관 구축

담당자

관광거점도시추진단 박용철(☎270-8534)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대건축자산을 이용하여 체험형 미디어아트를 설치하여 관광객 및

지역민에게  문화서비스를 제공하는 다목적 문화시설을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 12.~2023. 12.

○ 위 치 : 목포시 영산로10번길 10

○ 규 모 : 강당 2층 607㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,500	-	-	1,000	1,500
국 비	1,250	-	-	500	750
시 도 비	500	-	-	200	300
시군구비	750	-	-	300	450
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 구 심상소학교 사용에 대한 교육청과의 협의 불가에 따른 대체 사업지 발굴

○ 당초 : 구 목포공립심상소학교 → 변경 : 구 목포세관

○ 변경사업 : 구 목포세관 활용 실감미디어 콘텐츠 제작 및 설치

○ 변경사업에 대한 지방재정투자심사 완료 및 추진계획 수립(‘23. 4.)

○ 계약 완료 및 용역 착수(‘23. 6.)

□ 향후계획

○ 용역 사업 준공                         : ’24. 6. 15.

□ 사업변경 내역

○ 구 심상소학교 사용에 대한 교육청과의 협의 불가에 따른 대체 사업지 발굴

구 분	당 초	변 경
사 업 명	구 심상소학교 강당활용 실감미디어 콘텐츠 제작 설치	구 목포세관 실감미디어 콘텐츠 제작 및 설치
총사업비	25억원(국비 12.5억원, 도비 5억원 시비 7.5억원)
사업기간	‘22. 11. ~ `23. 11.	‘23. 6. ~ 24, 6.
사업위치	목포시 영산로10번길 10	목포시 항동 6-8, 6-33
사업규모	강당 2층 607㎡	2개동 및 본관터 1,848㎡

사업명

목포시 공용주차장 주차타워 건립

담당자

회계과이제만(☎270-3275)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시 청사 야외주차장에 공용주차 타워을 건립하여 방문 민원인 주차 민원 해소와 시청 주변 불법주차 근절로 인근 주민에게 주차 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 2 ~ 2024. 2

○ 위 치 : 용당동 1206-1

○ 규 모 : 주차장 2층(3단) 연면적 5,000㎡(주차장 364대⇒509대) 145대증설

- 기존 주차장 : 364면(본관동 2대, 민원동 77, 의회동 62, 야외 223)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   5,000   백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	-	-	5,000	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,500	-	-	2,500	-
시군구비	2,500	-	-	2,500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ `22.   7.      : 2023년도 균특전환사업 신청(주차환경개선)

○ `22.   9.      : 목포시 지방재정 투자심사 심의통과

○ `22.  12.      : 2023년도 균특전환사업 확정(국비 25억)

○ `23.   2.~9    : 목포시공용주차장주차타워 건립공사 설계용역 추진

□ 향후계획

○ `23.   8.       : 행정절차이행 (BF, 디자인, 건설기술 심의)

○ `23.   9.       : 계약심사 및 공사발주

○ `23.  10.       : 목포시 공용주차장 주차타워 건립공사 착수

○ `24.   2.       : 목포시 공용주차장 주차타워 건립공사 준공

사업명

목포 실내체육관~삼향동주민센터 간 위험도로 구조개선

담당자

도시디자인과 김태성(☎270-3445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대규모 아파트 단지 및 산단으로 진입하는 주간선도로로 폭이 좁고 굴곡이 심하여 시민들의 안전 위협

○ 특히 북항방면, 신외항으로 진입하는 대형 차량 및 인근 대규모 주택지로 진입하는 차량통행이 꾸준히 증가하는 상황으로 위험도로 개선 시급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2025.

○ 위 치 : 목포 실내체육관 ~ 삼향동주민센터

○ 규 모 : 도로선형개량 L = 400m, B = 15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비			100		2,100
시군구비			100		2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ ‘23.  1. : 실시설계 용역 추진

□ 향후계획

○ ’23. 12. : 사업비 확보 후 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

장좌도 접안시설 및 계류시설 설치

담당자

해양항만과 김용소(☎270-8858)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장좌도 내 대규모 해양관광리조트 조성사업이 추진됨에 따라 목포여객선터미널에서 장좌도를 연결하는 신항로를 개설하였으며, 여객선 운영시 선착장이 좁아 선박 접안 및 승객 승하선 불편을 개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025(4년)

○ 위 치 : 목포시 장좌도 일원

○ 규 모 : 계류시설 설치 1식, 선착장 확장 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,343	343	-	-	2,000
국 비	-	-	-	-
시 도 비	1,274	274	-	-	1,000
시군구비	1,069	69	-	-	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ `21. 9. : 장좌도 계류시설(부잔교) 설치 완료

□ 향후계획

○ `23. 10. : 장좌도 선착장 확장사업(1차분) 착공

○ `25. 12. : 장좌도 선착장 확장사업(총괄분) 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음