특 수 공 시 현 황

분야별 항목선정

연번	사 업 명	추진부서	비 고
	8개 사업
1	도시가스공급 보조사업지원	지역경제과
2	서남권친환경수산종합지원단지 조성	수산진흥과
3	해상케이블카 상부승강장~일등바위 탐방로 개설	공원녹지과
4	유달산둘레길 무장애나눔길 조성공사	공원녹지과
5	국립호남권생물자원관 건립	환경보호과
6	지능형 교통체계 구축	교통행정과
7	상동초기우수처리시설 설치사업	하 수 과
8	남악신도시 하수처리장 증설사업	남해수질관리과

도시가스공급 지원 보조사업

주민의 생활환경 개선을 위해 도시가스 공급사업을 추진함으로써 신･원도심 기회균등 및 경제적 부담감 해소

□ 개  요

○ 근   거 : 도시가스공급 보조금지원 및 관리조례

○ 지원대상 : 공급관 길이 100미터당 10세대이상 45세대 미만구간

○ 지원금액 : 전남도 도시가스 공급규정에서 정한 수요가부담시설분담금

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년이후
계	16,875	10,305	1,470	1,700	3,400
국비	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-
시비	16,875	10,305	1,470	1,700	3,400

□ ‘18년까지 추진실적

○ '18. 01. ~ 11 : 도시가스 공급관 설치(1,057세대, 1,470백만원)

※ ‘07~’18년까지 도시가스 공급실적 : 11,943세대, 117.7억원

□ 향후 추진계획

○ '18. 12. : 2019년 도시가스공급 지원 대상구간 주민설명회 개최

○ '19. 01. ~ 04. : 제4차(2020년 이후) 도시가스 공급 수요조사 실시

□ 기대효과

○ 시민 연료비 절감으로 편익증진 및 생활 불편 해소

서남권 수산종합 지원단지 조성사업

북항 배후부지 내에 수산물 생산‧유통‧물류 기능을 집적화 시켜 원스톱으로 어업활동을 종합적으로 지원할 수 있는 기반시설 확충

□ 개  요

○ 기    간 : 2014~2020

○ 위    치 : 목포시 죽교동 674-2외 2필지

○ 총사업비 : 32,062백만원 (국 14,984, 지방비 6,585*, 자담 10,493)

* 도비 796, 시비 5,789

○ 사업내용 : 위판장, 가공시설, 냉동․냉장, 제빙․저빙, 판매장, 보급창고, 유류공급시설(유류탱크 3기, 급유소 2개소, 고속주유기 4기) 등

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년이후
계	32,062	15,423	6,597	10,042	-
국 비	14,984	7,712	3,299	5,021	-
도 비	796	300	-	496
시 비	5,789	2,784	1,319	1,512
자부담	10,493	4,627	1979	3,013	-

□ ‘18년까지 추진실적

○ (서남권친환경) 공정률 35%

○ (유류공급시설) 친환경 수산종합지원단지 조성사업 총사업비 대상사업으로 편입 추진

□ 향후 추진계획

○ 유류공급시설사업 완료 : ‘19. 12월

○ 서남권 수산종합지원단지 조성사업 준공 및 가동 : ‘20. 상반기

□ 위 치 도

서남권 수산종합지원단지

□ 완공사진 (조감도)

해상케이블카상부승강장~일등바위 탐방로 개설

『목포해상케이블카』 개통에 따른 탐방객 증가에 대비 안전하고 편리한 숲길제공을 위함

□ 개  요

○ 기    간 : 2018년 ~ 2019년

○ 위    치 : 유달산둘레길 ~ 유달산승강장 ~ 일등바위 구간

○ 총사업비 : 1,408백만원 (균특 704  시비 704)

- 2018년 사업비 : 698백만원 (균특 349  시비 349)

○ 사업내용 : 데크로드(B2.3) 631m, 전망쉼터 3개소, 정상표지석 1점

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년이후
계	1,408	-	698	710	-
기금	704	-	349	355	-
도비	-	-	-	-	-
시비	704	-	349	355	-

□ ‘18년까지 추진실적

○ 탐방로 1구간(관운각~마당바위) 조성 완료 및 2구간 공사발주

○ 탐방로 조성구간 실시설계 용역(1~3구간) 완료

※ 1구간(관운각~마당바위 230m), 2구간(마당바위~일등바위 195m)

3구간(유달산승강장~관운각, 둘레길방향 206m)

□ 향후 추진계획

○ 탐방로 2구간 공사추진 및 3구간 공사발주

○ 급경사 계단구간 논슬립 설치 등 안전시설 보강 설치

○ 탐방로 안내 이정표, 다도해조망 안내판, 포토존 및 쉼터 조성

□ 기대효과

ㅇ 남녀노소 누구나 이용할 수 있는 안전하고 편리한 탐방로 제공

□ 위 치 도

이등바위

2구간

(일등바위~마당바위)

유달산

승강장

마당바위

3-1구간

(유달산승강장~관운각)

옛수원지

달 성 사

달성공원

유 선 각

1구간

(관운각~마당바위)

3-2구간

(일등바위~얼굴바위)

일등바위

□ 완공사진(조감도)

유달산둘레길 무장애나무길 조성공사

우리시를 대표하는 유달산에 조성된 둘레길과 생태적으로 안정된 숲을 교통약자층 등 다양한 계층이 쉽게 접근하고 숲 체험의 기회를 확대 산림복지 실현을 위함

□ 개  요

○ 기    간 : 2018년 당해년도사업

○ 위    치 : 유달산둘레길(죽교체육공원~조각공원)

○ 총사업비 : 417백만원 (복권기금 250  시비 167)

- 2018년 사업비 : 417백만원 (복권기금 250  시비 167)

○ 사업내용 : 무장애 데크로드 및 둘레길 노면 정비

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년이후
계	417	-	417	-	-
기금	250	-	250	-	-
도비	-	-	-	-	-
시비	167	-	167	-	-

□ ‘18년까지 추진실적

○ 무장애 데크로드 설치(324m) 및 둘레길 노면 확장 정비

□ 향후 추진계획

○ 무장애나눔길 조성지 주변 숲정비 및 수목식재를 통한 쉼터조성

○ 기 설치된 나눔길 권역과 연결할 수 있는 사업구간 발굴

□ 기대효과

ㅇ 지역주민, 관광객, 학교․유치원 등 다양한 계층에게 숲체험 공간 제공

ㅇ 장애인, 노약자, 임산부 등 교통약자층에게 숲을 접할 수 있는 기회 마련

□ 위 치 도

□ 완공사진(조감도)

국립호남권생물자원관 건립

호남권, 다도해 및 도서연안 생물자원의 체계적인 연구․수장․

보전을 위한 국립호남권생물자원관 건립

□ 개  요

○ 기    간 : 2013년 ~ 2019년

○ 위    치 : 목포시 달동 890번지 일원

○ 총사업비 : 53,400백만원 (국 47,300 시 6,100)

- 2018년 사업비 : 4,200백만원 (국 4,200)

○ 사업내용 : 생활자원관(수장·연구·전시·교육·야외시설 등) 건립

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년이후
계	53,400	16,300	4,200	32,900	-
국비	47,300	10,200	4,200	32,900	-
도비	-	-	-	-	-
시비	6,100	6,100	-	-	-

□ ‘18년까지 추진실적

○ ‘18. 1. : 목포 도시계획시설 실시계획인가 고시(목포시)

○ ‘18. 3. : 공사 착공(환경부)

○ ‘18. 6. : 편입토지 보상완료 및 지상권 설정 완료(목포시↔환경부)

□ 향후 추진계획

○ ‘19. 10 : 건립공사 준공(환경부)

○ ‘20. 상반기 : 국립호남권생물자원관 개관(환경부)

□ 기대효과

○ 생물자원 관련 인재양성과 관련 산업 육성의 전진기지 역할 수행

○ 연구사를 포함한 직원채용(120여명)으로 지역일자리 창출

□ 위 치 도

□ 조감도

지능형교통체계(ITS) 구축사업 용역

도심부 주요구간의 교통정보를 수집하고, 유관기관과의 정보연계를 통하여 도로이용자에게 교통정보를 제공함으로써, 도로 이용 효율의 극대화 및 도로이용자의 만족도를 높임

□ 개  요

○ 기    간 : 2019. 2. 1. ~ 2019. 7. 31.

○ 위    치 : (총 25.9㎞) 고하대로, 백년대로, 영산로, 해안로, 통일대로, 후광대로, 북항로

○ 총사업비 : 2,000백만원 (국 800, 시 1,200)

- 2018년 사업비 : 2,000백만원 (국 800, 시 1,200)

○ 사업내용

- 현장시스템 : 교통관제CCTV 6개소, 교차로감시카메라 16개소, 도로전광표지(VMS) 4개소, 교통량수집시스템(VDS) 11개소

- 센터시스템 : H/W 및 N/W 1식, 응용 S/W 개발 1식, 유관기관 연계 1식

- 기타 : 경찰서(신호 및 CCTV) 시스템 통합/이관 1식

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년이후
계	-	-	-	2,000	-
국비	-	-	-	800	-
도비	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	1,200	-

□ ‘18년까지 추진실적

○ ‘17. 01 : 목포시 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 및 고시

○ ‘17. 09. : 국토교통부 ITS 공모사업 선정(국비 8억 확보)

○ ‘18. 01. : 목포시 지능형교통체계(ITS) 국축사업 계획서 제출(국토교통부)

○ ‘18. 03 ~ 06 : ITS 구축 사업관리용역 발주 및 행정사항 이행 등

○ ‘18. 07 : 목포시 계약심의 위원회 심의 용청 및 일상감사 의뢰

○ ‘18. 09 : 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 계약의뢰(조달청)

□ 향후 추진계획

○ ‘19. 2월 : 공사 착공

○ ‘19. 7월 : 공사 준공

□ 위 치 도

□ 완공사진 (조감도)

도로전광표지	ITS 홈페이지(PC용, 모바일용)

공익정보 표출	미세먼지정보 표출

상동 초기우수 처리시설 설치사업

오염물질의 함유량이 많은 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염

예방과 버스터미널 앞 저지대 기습폭우로 인한 침수 문제의 근원적 해소

❐ 사업개요

❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2018년

❍ 위    치 : 목포시 상동 버스터미널 앞

❍ 규    모 : 저류조 V=10,000㎥, 기계실 1동, 전기실 1동, 공원조성 1식

❍ 사 업 비 : 15,609백만원(국비70% 10,926, 시비30% 4,683)

❍ 연도별 재원 투자계획

(단위 : 백만원)

재원별	총사업비	2016년까지	2017년	2018년
계	15,609	12,401	700	2,508
국 비	10,926	10,926	-	-
시 비	4,683	1,475	700	2,508

❐ ‘18년까지 추진실적

❍ '16.  1. : 저류조 설치완료(V=10,000㎥)

❍ '17.  1. : 하수관로 신설 L=168m 완료

❍ '17. 12. : 기계실 우수펌프 배관 및 건축공사 완료

❍ '18.  6. : 체육시설 및 공원 식재공사 추진(90%)

❐ 향후 추진계획

❍ '18.  9. : 전기실 건축공사 및 전기공사 완료

❍ '18. 10. : 펌프 시운전 및 공원조성 완료

❍ '19.  7. : 준공완료

□ 위 치 도

□ 완공사진

남악신도시 하수처리장 증설사업

옥암‧남악신도시 유입인구의 지속 증가에 따라 배출되는 하수량이

증가하고 있어 장래 하수처리시설 증설 추진

□ 개  요

○ 기    간 : 2013년 ~ 2019년

○ 위    치 : 옥암동 1376번지(남악신도시 하수처리장 내)

○ 총사업비 : 29,656백만원〔목포시(43.73%) 12,969, 전남개발공사(56.27%) 16,687〕

- 2018년 사업비 : 5,249백만원 (시 35,00 전남개발공사 1,749)

○ 사업내용 : 증설 10,000㎥/일(기존 12,000㎥/일)

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분	총사업비	기투자	2018년	2019년	2020년이후
계	29,656	19,249	5,249	5,158	-
시비	12,969	4,311	3,500	5,158	-
전남개발공사	16,687	14,938	1,749	-	-

□ ‘18년까지 추진실적

○ '15. 12.  9. : 총괄분 및 1차분 착공

○ ‘16. 10.  3. : 1차분 완료(PHC 말뚝 및 지하터파기)

○ ‘17.  6. 26. : 2차분 완료(가시설, 지하터파기 및 구조물공사)

○ ‘18.  5. 31. : 3차분 완료(구조물 공사, 건축공사 및 방류관로 매설)

□ 향후 추진계획

○ 19. 10. : 시운전 및 사업완료

□ 기대효과

○ 옥암·남악신도시 지역은 원활한 하수처리 가능

□ 위 치 도

증설현장

대학부지

해양수산청

인공폭포

□ 현 장 사 진